문서번호	교통운영과-16170
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		교통안전팀장		교통운영과장
손태빈		김세교		10/20 강진동
협 조

2020년 예산 재배정 변경 보고

2020. 10

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 예산 재배정 변경 보고

『교통사고 사망자 절반 줄이기 시책』의 일환으로 추잔중인 교통사고 잦은 곳 개선사업 및 교통사망사고 줄이기 사업을 시행하기 위하여 예산을 재배정 하였으나 변경 사항이 발생하여 이에 대한 조치 계획 보고임

□ 추진사항

○ ’20. 4~5월 : 교통사고 잦은 곳 1,2차 예산 재배정

○ ’20. 3~9월 : 무단횡단 금지시시설 예산 재배정

○ ’20. 10월 : 2020년 사업 예산 집행률 제고를 위한 예산 수요조사

□ 예산 변경내용

○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 및 무단횡단 금지시설 설치와 관련하여 유관기관 협의 완료 후 예산을 재배정 하였으나, 현장 상황에 따른 사업 내용 변경에 따른 예산 증·감 재배정 요청이 있어 예산 변경이 필요한 상황임

○ 사업 예산변경 내용(단위 : 천원)

- 감배정

사업부서	예산과목	당 초	변 경	비 고
남부도로사업소 기전과	교통사고 잦은 곳 개선	1,003,270	814,137	감 189,133
강서도로사업소 기전과	교통사고 잦은 곳 개선	404,740	304,740	감 100,000
서초구 교통행정과	교통사고 잦은 곳 개선	75,460	-	감 75,460
성동도로사업소 도로보수과	교통사망사고 줄이기	624,320	614,320	감 10,000
	계			감 374,593

- 추가배정

사업부서	예산과목	당 초	변 경	비 고
남부도로사업소 도로보수과	교통사고 잦은 곳 개선	54,180	243,773	증 189,593
	교통사망사고 줄이기	652,300	662,300	증 10,000
강서구 교통행정과	교통사고 잦은 곳 개선	-	125,000	증 125,000
송파구 교통행정과	교통사고 잦은 곳 개선	87,480	137,480	증 50,000
	계			증 374,593

□ 조치계획

○ 위와 같이 예산의 변경사항을 사업부서에 통보하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

□ 추진계획

○ 2020. 10월 : 변경 예산 재배정

○ 2020. 10월 ~ 12월 : 사업 시행 및 완료

끝.