투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경 및 준공기한 연기 의뢰(제2자유로 종점부 입체화 전기공사)

우리 본부에서 진행중인 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사」 관련아래와 같이 설계변경(총차1회, 1차1회) 및 준공기한 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사

나. 계약자 : *******

다. 변경사항 : 계약금액 및 준공기한

라. 변경사유 : 시공물량 증감(계약금액 변경), 선행공사 준공기한 연기에 따른 순연

마. 변경계약 요청 내용

구 분		당 초	변 경	비 고
계약금액	1차	*************	*************	****
	총차	***************	***************	**********
공사 기간	1차	*******************	*******************	****
	총차	*******************	*******************	*****

붙 임: 1)설계변경 및 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2)설계변경 내역서 총차,1차 각 1부.

3)계약변경 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	오삼록		설비부장	10/20 이달영
협조자
시행	설비부-15997	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	부분공개(7)