문서번호	한옥건축자산과-10394
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
김현우		최장길	10/22 신동권
협조

정세권 전시관 조성공사

전문가 자문회의 계획

2020. 10.

도시재생실

(한옥건축자산과)

정세권 전시관 조성공사 전문가 자문회의 계획

정세권 전시관 조성공사(건축) 중 추가된 공사물량에 대한 공기연장 검토를 위해 전문가 자문회의를 시행코자 함

□ 추진배경

○ 건축공사 시행 중 추가 발생한 공사물량에 대해 공기연장 요청(시공자)

− 당초 계약서에 반영되지 않은 건물 해체 후 드러난 기둥부식 부분 보수공사 등 추가 발생한 공사물량에 대해 공기연장 요청

□ 추진경위

○ ’20.07.10 : 공사착수

○ ’20.08.03 : 공사중지(현장대리인 미배치)

○ ’20.08.27 : 현장대리인 교체 승인 및 공사재개

□ 개최개요

○ 공 사 명 : 정세권 전시관 조성공사(건축)

○ 계약기간 : 2020. 7. 7. ~ 2020. 10. 27.

○ 일    시 : 2020. 10. 22.(목) 16:00

○ 장    소 : 공사현장(계동 25) 및 한옥지원센터

○ 참 석 자

− 서 울 시 : 건축자산지원팀장, 담당

*************************************

− 시 공 자 : 이유종합건설(주) 현장대리인

− 감 리 자 : ㈜구가도시건축 건축사사무소

○ 자문내용 : 추가 공사물량에 대한 공기연장 적정성 및 기간 검토․자문

− 공사현장 방문 및 현황 파악 후 자문회의 시행

□ 행정사항

**************

**************************************

○ 예산과목 : 도시재생실 한옥건축자산과, 한옥건축자산보전진흥, 전통문화계승발전(일반), 한옥지원센터 운영 및 한옥 유지보수 지원, 사무관리비

□ 향후계획

○ ‘20. 10 ~     : 회의결과 반영 준공기한 연기 및 공사 계속

○ ‘21. 10 ~     : 준공정산 설계변경.  끝.