문서번호	건축부-17816
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
장도영		차무흥	10/22 이창구
협조
	주무관		이준범

『동북권 세대융합형 복합시설 건립공사』총차 및 3차분 설계변경(제3회) 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(건축부)

『동북권 세대융합형 복합시설 건립공사』

총차 및 3차분 설계변경 검토보고(제3회)

「동북권 세대융합형 복합시설 건립공사」의 건설사업관리자로부터 제출된 제3회 설계변경 요청건에 대하여 검토하고 보고드림

1		공사개요

○ 위    치 : 도봉구 마들로 13길 84 (창동 1-8)

○ 공사개요 : 지하2층/지하5층, 연면적 17,744.60㎡, 신축

○ 공사기간 : ‘18.06.28. ~ ‘20.10.24.(‘20.04.01. ~ ‘20.10.24.)

○ 공 사 비 : **********************

○ 시 공 자 : ㈜윤익건설 외 2개사

○ 감 리 자 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소 외 1개사

2		추진경위

○ ‘18.06.19 : 공사계약 및 착공(‘18.06.28)

○ ‘19.03.25 : ***********************

○ ‘19.03.27 : 1차분 공사 준공

○ ‘20.03.26 : *********************

○ ‘20.03.31 : 2차분 공사 준공

○ ‘20.09.28 : 설계변경심사 제외 대상 알림(계약심사과)

○ ‘20.10.12 : 설계변경 자문 소위원회(조건부가결)

○ ‘20.10.21 : 제3회 설계변경 요청(건설사업관리단)

3		설계변경 내용

○ 관련근거

- 설계변경 자문 소위원회(20-9차) 개최결과(건축부-17348, ‘20.10.14)

- 제3회 설계변경 자문회의 조치결과에 대한 적정성 검토보고(창복CM(발) 제2010-22호, ‘20.10.16)

- 제3회 설계변경에 따른 계약금액 조정승인 요청(토문 제2020-1201호, ‘20.10.21)

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) 승인 통보(건축부-6326호, ‘19.04.17.)

- 물가변동으로 인한 계약금액 조정(2회) 승인통보(도시기반시설본부-20-4722호, ‘20.04.20.)

○ 변경내용

- 계약금액                                    (단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구 분		당 초(a)	변 경(b)	증 감(c=b-a)
**	**	*************	*************	**	***********
	**	***********	***********	**	**********
	**	***********	***********		*
	***	*************	*************	**	***********
	***		*************	**	*************
	****	*************	*************	**	*************
**	**	**************	**************	**	***********
	**	*************	*************	**	**********
	**	***********	***********		*
	***	**************	**************	**	***********
	***	*	*************	**	*************
	****	**************	**************	**	*************

- 계약기간(총차 및 3차) : 변경없음

○ 주요 변경내용 및 사유

구분	변경내용	사 유	비 고
****	*****************	*******************************	********************** ****************************
**	*****************	******	****************************
	*******************	*******	****************************
	***************	******* *******	****************************
	**********************	*******	****************************
	***************************************	**********	****************************
	****************	**********	****************************
	***************	*******	****************************
	**************************	******** *******	*****************************
**	*****************************	************	****************************

※ 세부 변경내역 : 첨부 참조

○ 단가적용

- 기존 비목(물량증감) : 계약단가 적용

- 신규비목의 단가 : 설계변경 당시 기준 단가에 협의율, 낙찰율 적용 등

4		건설사업관리단 검토의견

***************************************************************************

***************************************

5		처리의견

**********************************************

붙임 1. 설계변경(총차 및 3차) 계약금액 조정 승인 요청서류 1부.

2. 설계변경 자문희의 조치결과 적정성 검토보고 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인 1부.  끝.