문서번호	토목부-20455
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
김선배		최진우	10/23 김용제
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

한가람로 진입램프 신설에 따른 올림픽대로 선형변경 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

한가람로 진입램프 신설에 따른 올림픽대로 선형변경 검토보고

주민 민원에 의거 설치되는 한가람로 진입램프 추가 설치를 위해 올림픽대로 선형변경을 위한 설계를 완료하고 최종 설계변경에 반영하고자 보고드림.

Ⅰ		관련 근거

○ 한가람로 진입램프 신설에 따른 올림픽대로 선형변경 실정보고

【올대감 20-237(‘20. 10. 19.)호】

Ⅱ		사업 개요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 1. ~ ‘21. 12. 31.

○ 총사업비 : 전체 50,791백만 원 (‘20년 : 11,200백만 원)

○ 감리사/시공사 : ㈜이산외 2개사 / ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 83.2%

Ⅲ		추진 경위

◦ '18.11.16. : 민원접수(올림픽현대아이파크)

- 민원내용 : 한가람로를 통한 올림픽대로 접근성 확보

◦ '19.05.31. : 제1차 사업계획변경 조정심의회 개최(행정2부시장외 6명)

- 심의결과 : 교통편익과 안전을 확보하는 방안으로 계획변경 “적정”

◦ '19.06.10. : 사업계획 변경(도로계획과)

◦ '19.08.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 착수

◦ '19.11.29. : 주민간담회 개최

◦ '20.09.    : 한가람로 진입램프 기본 및 실시설계 완수

Ⅳ		검토 내용

○ 집단민원 해소(’18.11.16) 및 올림픽대교 남단사거리 교통정체 해소를 위해,

○ 사업계획변경(’19.6.10.)되어 추진하는 한가람로 추가진입로를 확보하기 위해 올림픽대로 선형변경이 필요하며 이에 대한 검토보고 임

○ 올림픽대로 선형변경 현황

- 올림픽대로 선형변경 : 연장 L=840m

선형 변경구간

한가람로 추가진입로

설치구간

올림픽대교

※ 위 도면에 따른 상세 횡단면도(올림픽대로, 하남방향, 종점부)는 붙임 자료 참조.

◦ 주요변경 내역

-  본선부 옹벽신규설치 : [당초]L=0m    → [변경]L=218m(증: L=218m)

- 가드레일           : [당초]2,734경간 → [변경]3,079경간(증: 345경간)

- 기타              : 토공,배수공,포장공,교통안전시설공,품질시험비, 조경공

→ 선형변경(set back)에 따른 공종별 수량증가

◦ 공사비 증.감 검토

- 단가적용 : 공사관리일반조건(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

⦁ 신규비목 : 1) 설계단가    × 협의율적용(85.98%)

2) 표준시장단가 × 100%적용

- 항목별 세부 단가검토

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
o 토공
기존구조물깨기		m3	******	******	*****	*******	*******	******
흙깎기 외		식	*	*	*	*********	*********	*******
o 배수공
측구공		m	******	******	*****	*******	*******	******
옹벽공 외		식	*	*	*	*******	*******	******
o 구조물공
Ramp-E, J1, J2	교량 3개소	식	*	*	*	*********	*********	*
본선	옹벽공 외	식	*	*	*	*******	*********	*******
o 포장공
아스콘포장	표층,중간,기층	a	*****	*****	***	*******	*******	******
보조기층 외		식	*	*	*	*********	*********	******
o 교통안전시설공
가드레일		경간	*****	*****	***	*********	*********	*******
교통표지판 외		식	*	*	*	*******	*******	******
o 품질시험비
품질시험비	함수비 외	식	*	*	*	******	******	******
o 상수도공
상수도이설		식	*	*	*	*********	*********	*
o 조경공
식재 및 이식	교목 및 관목	주	*******	*******	******	*******	*******	******
수목제거 외		식	*	*	*	*******	*******	*******
직 접 비						**********	**********	*********
간 접 비						*********	**********	*******
도 급 비						**********	**********	*********
관 급 비						*********	*********	*******
이 설 비						*********	*********
총 공 사 비						**********	**********	*********
폐기물처리비						*******	*********	*******
총 사 업 비						**********	**********	*********

Ⅴ		조 치 계 획

○ 책임건설사업관리기술자의 실정보고와 같이 “한가람로 진입램프 신설에 따른 올림픽대로 선형변경”에 대한 설계내용이 타당하다 판단되므로, 실정보고 승인 후 설계변경에 반영하고자 합니다.

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.