투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(근무환경개선공사))

1. 시설보수과 방침서-3730(2020.10.22.)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 시행하고 있는 “난지물재생센터내 근무자운영실 및 작업실 근무환경개선공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 난지물재생센터내 근무자운영실 및 작업실 근무환경개선공사

나. 공사기간 : 2020.05.28..~ 2020.10.31.(당초)

다. 도 급 자 : ㈜ 정건 대표 정성준

라. 연기사유 : 우천 및 단면·균열 보수 위치 변경에 따른 적정 위치 재 선정으로 공기 부족

마. 준공기한 연기요청 현황

구분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	1,201,909,900원	1,201,909,900원	변경없음
계약기간	2020.5.28. ~ 2020.10.31.	2020. 5. 28. ~ 2020. 12. 10.	40일 연장

붙임 : 방침서 및 관련자료 (합의각서 별도 송부) 1부. 끝

	시설보수과장
★주무관	신재현		시설팀장	우배용		시설보수과장	10/23 代우배용
협조자
시행	시설보수과-3730	(		)	접수		(		)
우	10542	은평구 갈현로7길 49 (역촌동 산31-1)	/
전화	02-3156-3041	/전송		/	sjh9186@seoul.go.kr	/	부분공개(5)