문서번호	설비부-16521
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	10/27 이달영
협조

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 전기공사』

관급자재(조명등기구) 구매 계약취소 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 전기공사』

관급자재(조명등기구) 구매 계약취소 검토보고

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 전기공사』건설사업관리단 에서 검토보고 된 관급자재(조명등기구)의 구매 계약취소 및 조치계획에 대해 아래와 같이 보고 드림

1		공사개요

1. 전기공사

□ 공 사 명 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립 전기공사

□ 공사기간 : 1차 2018.04.03.~2020.11.16(총차 2018.04.03.~2021.02.15.)

□ 도 급 비 : 1차 436,103,000원(총차 1,021,381,000원)

□ 시 공 사 : ㈜아이엔아이 대표 이상우

□ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소,(주)무영씨엠건축사사무소

2		관련근거

□  PC G밸리 제*******01호(2020.10.26.) : 관급자재 구매계약취소 요청 검토보고

3		검토 내용

□ 대상 관급자재 계약현황

(단위 :원)

연번	계약번호	품명	계약자	납품기한	금액	비고
1	22193233700	[조명등기구] LED 실내조명등 7종 421개	세전사	2020.10.31	34,616,000	조달구매 다수공급자 계약
2	22193227101	[조명등기구] LED 다운라이트 15W 488개			19,520,000
3	22163289306	[조명등기구] LED 경관조명 4종 97개			20,010,000

□ 납품요구 취소사유

○ 전기공사 공사기한 연기 및 공기지연에 따른 납품자재 설치시기 미도래

※ G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사(건축공사 및 설비공사) 준공일은 2021.02.15이나 현재 건축공사 중단(2020.08.24.~) 중이며, 이에따른 공기지연 예상

□ 납품요구 취소사유 검토

구분		검토내용	비고
1	******** ******************	**************************** **************************************
2	************	*********************************************************
3	************	************************************ ****************************
4	*********	*****************************************************************************

4		감리단 기술검토 의견

□ 해당관급자재(조명등기구)는 건축 준공 기한 내 반입, 설치가 불가능하여 기존계약을 취소하고, 물품다수공급자계약 특수조건 제26조4항(납품기한의 변경)에 의거, 해당 계약상대자와 새로운 구매계약을 체결함이 것이 타당함.

5		보고자 조치의견

□ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되어, 계약부서에 기존 물품의 계약취소 의뢰하고, 기존 계약상대자와 동일규격의 관급자재를 구매하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임  1. 감리단 공문 1부.

2. 기존계약내역(분할납품요구 및 통지) 3부.

3. 합의서 3부. 끝.