구민이 주인되는 희망강북!
			강북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	도선사 마애불 소방시설 구축공사(건축/기계) 설계변경 실시

1. 문화관광체육과-28494(2020.11.12.)호와 관련입니다.

2.  「도선사 마애불 소방시설 구축공사(건축/기계)」와 관련하여 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 도선사 마애불 소방시설 구축공사(건축/기계)

나. 계약금액: 금142,440,000원(금일억사천이백사십사만원정)

다. 시 공 사:

라. 2020.09.09. ~ 2020.12.07.

마. 공사내용

1) 펌프실 조성 공사

2) 소화용수실 조성 공사(기존 저수조 내부 설치)

3) 철거 공사 등

바. 설계변경 사유

- 펌프실 공사: 현장여건상 설치공간 부족으로 펌프실 면적 축소

- 저수조 공사: 내부 단열공사 취소 및 기초 콘크리트 타설 방법 변경

- 철거 공사: 저수조 상부건물 바닥철거 제외

- 소운반: 현장 실거리 및 고도 실측 반영하여 경사지 할증, 평지 리어카 운반 변경

사. 변경금액: 142,440,000원 ⇒ 122,090,000원 (감 20,350,000원)

아. 예산과목: 문화관광체육과, 문화유산 보존, 문화재 관리, 시지정문화재 보수정비사업, 시설비및부대비, 시설비

붙임:  1. 실정보고 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.

주무관							신규진				문화정책팀장					송정석					문화관광체육과장					김선옥					행정관리국장						11/17 代안승길
협조자				계약팀장							조기곤					재무과장							김화운					기획재정국장								정연욱
시행			문화관광체육과-28811										(						)		접수												(						)
우	01071					서울특별시 강북구 도봉로89길 13(수유동)																/			http://www.gangbuk.go.kr
전화		901-6205							/전송			02-901-6210					/	amadeus6@gangbuk.go.kr													/	부분공개(5)