“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	도로관리과-23718		주무관	도로조명팀장		도로관리과장		안전교통국장
			이동민	정찬호		이한규		전결 11/18 김만호
등록일자	2020.11.18.
결재일자	2020.11.18.
공개구분	대시민공개
			협조자
					재무과장		지영애
					계약팀장		한혜란

- 2020년 가로등(2구역) 유지보수 공사 (연간단가) -

설계변경시행(2회) 계획

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 가로등(2구역) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 2. 14. ~ 2020. 12. 31.

○ 계약금액 : 259,171,310원

○ 계 약 자 : 유정전설 주식회사 대표 류희정

▢ 설계변경 내역

구분		변경내역		증ㆍ감	비 고
		당초	변경
총 공사비		306,171,310	380,560,940	증) 74,389,630
도급비	공급가액	235,610,282	289,361,882	증) 53,751,600
	부가가치세	23,561,028	28,936,188	증) 5,375,160
	계	259,171,310	318,298,070	증) 59,126,760
관급비		45,000,000	62,262,870	증) 17,262,870
이전비		2,000,000	0	감) 2,000,000

▢ 조치의견

○ 신규공종 및 물량 증·감 반영하여 설계변경코자 함.

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조 • 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 제1항
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 시공물량 증가 및 신규공종 발생
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 예산 범위 내 물량변경
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 지역주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ㅇ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ㅇ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 동일 시행
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

- 2020년 가로등(2구역) 유지보수 공사 (연간단가) -
설계변경시행(2회) 계획

우리구에서 시행중인『가로등 (2구역) 유지보수공사 (연간단가)』와 관련하여 신규공종 발생 및 물량 증·감에 따른 변경사항을 설계 반영하여 시행하고자 함.

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 :  2020년 가로등(2구역) 유지보수 공사 연간단가)

□ 규    모

○ 강남구 관내 가로등 시설물 유지보수 (선릉로 포함 서측)

○ 그늘막쉼터 로고(미미위) 전원케이블 설치

○ 2020년 노후 도로조명시설 추가정비사업 시행 (시비) 등

□ 계약금액 : 259,171,310원

□ 사업기간 : 2020.2.14. ~ 2020.12.31.

□ 시 공 사 : 유정전설 주식회사 대표 류희정

2		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 가로등 시설물 유지관리 낙찰차액 활용 계획[도로관리과-17990호]

- 낙찰차액 활용에 따른 도급비 증액

○ 2020년 노후 도로 조명시설 추가정비 시행(2차)[도로관리과-19280호]

- 시비 사업 시행에 따른 도급비 및 관급비 증액

○ 신규공종 및 민원에 따른 물량 증가로 이전비(전액)를 도급비로 변경

○ 제경비(보험료, 안전관리비등) 실제 납부금액 정산에따른 변경

□ 공사비 증·감 내역

구분		변경내역		증ㆍ감	비 고
		당초	변경
총 공사비		306,171,310	380,560,940	증) 74,389,630
도급비	공급가액	235,610,282	289,361,882	증) 53,751,600
	부가가치세	23,561,028	28,936,188	증) 5,375,160
	계	259,171,310	318,298,070	증) 59,126,760
관급비		45,000,000	62,262,870	증) 17,262,870
이전비		2,000,000	0	감) 2,000,000

□ 주요 물량 증·감 내역

공종	규격	단위	수량		증ㆍ감	비 고
			당초	변경
가로등 램프 교체	각종	개	310	370	60
가로등 안정기 교체	각종	개	308	371	63
가로등 표찰 부착	밴드식	개	70	65	5
가로등 표찰 철거	밴드식	개	60	51	9
경사주 정비	8-12M	본	9	16	7
보행등기구 철거	50W	개	0	79	79	신규
보행등기구 설치	50W	개	0	79	79	신규

□ 예산과목

○ 도로관리과, 도로시설 관리, 가로조명시설물 정비 및 공사, 가로등 시설물 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 (구비)

○ 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후도로조명 시설개량사업, 시설비 (시비 - 재배정 사업) [도급비 21,077천원]

3		조치 계획

□ 상기 보고내용과 같이 변경사항을 반영하여 설계변경 시행코자 함.

붙임 : 1. 2020년 도로조명 사업 시행계획 1부.

2. 가로등 시설물 유지관리 낙찰차액 활용 계획 1부.

3. 2020년 노후 도로조명시설 추가정비사업 시행 계획 (시비)

4. 설계변경내역서 1부.

5. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.