코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	상계장암 도시개발구역 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가 고시

1. 노원구 도시관리과-14121(2020.11.05.)호와 관련입니다.

2. 상계장암 도시개발사업과 관련하여 사업시행자인 서울주택도시공사에서 노원구를 경유하여 신청한 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가 사항에 대하여「도시개발법」 제4조, 제17조에 의거 개발계획 변경 및 실시계획 변경인가하고, 같은 법 제9조, 제18조에 의거 이를 고시하고자 합니다.

가. 변경내용 : 사업 시행기간 변경

구 분		사 업 시 행 기 간		비 고
		기 정	변 경
시행기간	1공구	2004.09.18. ∼ 2016.12.01.	2004.09.18. ∼ 2016.12.01.
	2공구	2004.09.18. ∼ 2019.03.14.	2004.09.18. ∼ 2019.03.14.
	3공구	2004.09.18. ∼ 2020.12.31.	2004.09.18. ∼ 2021.12.31.

나. 변경사유: ***********************************************

붙임: 1.개발계획 변경 및 실시계획 변경인가 검토보고서 1부.

2.고시문(안) 1부.  끝.

주무관	김환희		도시개발팀장	이진오		도시활성화과장	11/23 김용학
협조자
시행	도시활성화과-13050	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로110 서울특별시청 11층	/
전화	02-2133-4647	/전송	02-2133-0740	/	kwhanh16@seoul.go.kr	/	부분공개(5)