투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	개봉고가 건설사업관리용역 설계변경(전체2회, 2차 1회) 계약 의뢰

우리 부에서 시행 중인「개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역」에 대하여 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 용 역 비 : 금4,515백만 원(2차: 1,341백만 원)

다. 용역기간 : ’19. 6. 17.~’23. 7. 16.(2차: ’19. 2. 17.~’20. 12. 31.)

라. 용 역 사 : ㈜유신 외 2

마. 설계변경내역(전체2회, 2차1회)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
용역비	전 체	4,515,390	4,710,090	증) 194,700
	2차(금차)	1,341,000	1,368,700	증) 27,700
용역기간	전 체	2019. 6. 17. ~2023. 7. 16.	2019. 6. 17. ~2023. 7. 16.	-
	2차(금차)	2020. 2. 17. ~2020. 12. 31.	2020. 2. 17. ~2020. 12. 31.	-

바. 변경사유

- 물가변동 반영

- 건설사업관리기술인 투입계획 변경

사. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계),	중차량노선 시설물 성능개선, 시설비 및 부대비, 감리비

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서(전체2회, 2차1회) 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	代이상욱A		토목부장	11/24 김용제
협조자	재무예산과장	홍은미
시행	토목부-22731	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개