보고서(급수공사연기)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이동석	김광운	07/29 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-18376

2014년성동구상수도공사 감독업무 수행중 ************  급수공사 연기 요청 있어 아래와 같이 보고합니다.

보고자 :  ******  이 동 석

공사현황 : 2014년성동구상수도공사(장기계속단가계약)

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	****************	***	‘14.07.30	신설15

연기요청사항

연번	주소	수요가명	요청인	연기 기간	연기요청 사유
1	****************	***	***	‘14.08.31	입주자간 계량기설치장소 협의로 인한 연기요청

검토결과

- 상기 위치에 대하여 급수공사 시행하려하였으나 수요가 사정으로, 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	****************	***	‘14.07.22 ∼ 07.30	‘14.07.22 ∼ 08.10

첨 부 : 공사연기 요청서 각 1부. 끝.