투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울교통공사사장
(경유)	궤도처장
제목	하남선(5호선연장) 관련 서울교통공사 요구사항에 대한 회신

1. 귀 기관의 많은 협조에 감사드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 궤도처-5354(’20.11.24.)호 「하남연장선 1단계구간 접속부 궤도시설물 미비사항 보완 요청」

나. 궤도처-5367(’20.11.24.)호 「하남연장선 1단계구간 궤도시설 하자업무 관련 자료 요청」

3. 요청사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

○ 기존선 접속구간 미비사항(침목교환) 처리 요청의 건

→ 공사 재개시(공사 일시 중지/’19.11.5.~’21.5.31.) 검토 반영 예정

○ 1단계 구간 하자 관련 자료 요청의 건 : 붙임 참조

붙임: 1. 하자담보내역서 1부.

2. 공구별 경계기준 1부.

3. 하자보수보증서 1식(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현오		궤도과장	허동		도시철도토목부장	11/30 최병훈
협조자	주무관	김근수
시행	도시철도토목부-12638	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)772-7306	/		/	대시민공개