(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)

공사개요

· 위    치 : 중구예장동 4-1일원

· 규    모 : 주차장 및 공원조성, 교통체계개선

· 공사기간 : ‘17.08.31.~’20.12.31

· 도 급 비 : 33,296백만원

· 시공사 : 케이비아이산업개발(주)외 3개사

· 감리단 : ㈜동성엔자나어링 외2개사

· 설계사 : 시아플랜 건축사사무소

실정보고 건명

연결교량 보행로 및 외방재 변경

(남산예장 감리 제2020-681호(2020.11.30.)

실정보고 사유

(연결교량 외장재)

- 연결교량 외방재를 E/S연결시 하부의 하지(청물)가 토사에 메몰되어 손상 우려가 있으며, 수목식재 등이 충분하게 반영된바, 77㎡ 삭제 필요

(교량 보행로)

- 석축 및 수목 저촉에 따른 기초 플레이트 보완 및 사보강재 보완

- 계산 부분은 수목제거 없이 선형 변경

- 보행데크 난간 누락분 반영

건설사업관리단

검토의견

- 상기 실정보고 사항에 대한 검토 결과 변경 반영함이 적정함.

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

- 예산 증/감 현황

구 분	당 초	변 경	증 ‧ (△)감	비 고
교량 보행로	223,000,802	212,965,764	감 10,035,038	(단위:원)
교량 외장재	257,058,813	231,352,930	감 25,705,883
보행로 난간	-	35,555,195	증 35,555,195
직접공사비	480,059,615	479,873,889	감 185,726
제 경 비	148,180,385	146,596,111	감 1,584,274
공급가액	628,240,000	626,470,000	감 1,770,000
부 가 세	62,824,000	62,647,000	감 177,000
도급금액	691,064,000	689,117,000	감 1,947,000

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

현장 여건을 고려한 책임건설사업관리 용역 기술인의 검토의견은 적정함.

비 고

붙임 : 실정보고 검토 보고서 1부.

결재

주무관

김소연

방재시설과장

김태중

방재시설부장

12/02

박홍봉

협조