문서번호	기반시설과-4780
결재일자	2020. 12. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정창수		라철흠	12/02 전영주
협조	주무관		송하연
	주무관		이균휴

『암사초록길 조성공사』공사 설계변경 (전체4회,3차1회)시행 보고

2020. 11.

한강사업본부

(시  설  부)

『암사초록길조성공사』

공사 설계변경(전체4회, 3차1회) 시행 보고

『암사초록길조성공사』와 관련 건설사업관리 책임기술자가 제출한 설계변경 건에 대한 변경물량 및 도급비 변경내용 등을 검토 후 반영하여 설계변경 처리하여 공사에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

❍ 위    치 : 강동구 암사동 164일대(올림픽대로 상)

❍ 사업기간 : 2011. 2. ～ 2022. 12.

❍ 시설개요

- 올림픽대로 내 지하차도 건설 : 왕복 8차로, 길이 50m

- 지하차도 상부 공원 및 초록길 조성 : 4,800㎡

❍ 총사업비 : 260억원(공사비233억원, 설계비 12억원, 감리비15억원)

❍ 시 공 사 : 뉴프린스종합건설㈜ 외 3개사)

❍ 감 리 단 : ㈜유신 외 2개사

❍ 계약금액 및 공사기간

(단위:천원)

구 분	총 차	3 차	비 고
계약금액	12,037,619	2,523,344
계약기간	‘11.03.21 ~‘22.12.31	‘20.08.04 ~‘20.12.30

□ 설계변경 사유

❍ 변경근거 : 감리-20-1157(2020.11.27)

- 암사초록길 조성공사 전체분 제4회 및 3차분 제1회 설계변경 요청

- 암사 그린웨이 조성공사의 지하차도가 당초 파형강판공법에서 RC BOX(2련)형으로 변경되어 현재 보완설계 중으로 선시공 지시 및 실정보고 승인된 공종(가설휀스, 공사용진입가도 등)을 반영하여 기시공 및 시공중에 있는 부분에 대한 설계변경이며,

- 보완설계 완료 후 전체 설계변경 예정이며 금회 설계변경은 삭제 예정인 파형강판 내역의 물량을 조정하여 계약금액 증감 없이 변경코자 함

❍ 실정보고 승인

내용	승인번호	설계변경 내용 (당초→변경)	공사비(천원)			비 고
			당초	변경	증.감
현장사무실 임대사용	기반시설과 -2852 (2020.8.13)	현장사무실 임대 (-개월→29개월)	-	36,837	36,837
교통처리계획 설계 용역비	기반시설과 -3547 (2020.9.21)	교통대책 수립비 (-식 → 1식)	-	19,800	19,800
가설울타리 설치	기반시설과 -4114 (2020.10.27)	- 고정식 (-m →1,153m) - 이동식 (-m → 800m)	-	295,923	295,923
수목이식 및 제거	기반시설과 -4632 (2020.11.25)	- 제거 (-주 →618주) - 이식 (-주 →144주)	-	281,098	281,098
공사용 진입가도	기반시설과 -3559 (2020.9.22)	공사용 진입도로 ( -식→ 1식)	-	551,249	551,249
가설 보도육교	기반시설과 -3737 (2020.10.5)	보도육교 ( 1식→ 1식 )	686,516	987,099	300,583

❍ 전체분 4회 공사비(도급비)증·감 내용(도급비:변경없음)

(단위:원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증.감
공급가액	8,711,573,637	9,123,464,546	411,890,909
부가가치세	871,157,363	912,346,454	41,189,091
물가변동조정금액	2,454,888,000	2,001,808,000	453,080,000	1회~7회
도급금액	12,037,619,000	12,037,619,000	-

❍ 3차분 1회 계약금액 변경현황(도급비:감805,805,360)

구분	금액			비고
	당초	변경	증.감
총공사비	3,300,000,000	3,300,000,000
공급가액	1,850,000,000	1,555,288,182	294,711,818
부가가치세	185,000,000	155,528,818	29,471,182
물가변동조정금액	488,344,000	183,000	488,161,000	1회 ~ 7회
도급금액	2,523,344,000	1,717,538,640	805,805,360
관급자재비	-	52,206,340	52,206,340
이전비	776,656,000	1,530,255,020	753,599,020

❍ 전체분 주요 공사비 변경 현황

(단위:원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증.감
1. 공통공사	544,798,282	1,177,018,451	632,220,169
2. 토공	3,697,976,184	3,698,450,856	474,672
3. 배수공	315,178,759	315,178,759	-
4. 구조물공	1,320,483,832	744,922,897	575,560,935
5. 포장공	497,055,054	497,055,054	-
6. 부대공	236,847,175	236,847,175	-
7. 조경공사	365,563,946	544,443,429	178,879,483
가.직접공사비계	6,977,903,232	7,213,366,841	235,463,609
8. 간접노무비	180,683,434	211,179,885	30,496,451
9. 산재보험료	87,812,148	102,633,424	14,821,276
10. 고용보험료	17,562,429	20,526,684	2,964,255
11. 건강보험료	36,991,019	41,972,002	4,980,983
12. 노인장기요양보험료	2,422,911	2,749,166	326,255
13. 연금보험료	57,696,683	65,465,764	7,769,081
14. 퇴직공제부금비	51,946,487	60,714,217	8,767,730
15. 안전관리비	127,736,102	131,082,329	3,346,227
16. 하도급수수료	4,465,858	4,616,554	150,696
17. 기타경비	274,452,188	283,013,642	8,561,454
나. 순공사비계	7,819,672,491	8,137,320,508	317,648,017
18. 일반관리비	265,868,864	276,668,897	10,800,033
19. 이윤	543,554,209	608,695,250	65,141,041
20. 미확정설계공종	6,865,740	6,865,740	-	폐공 처리비
21. 제요율적용제외공종	75,612,333	94,112,333	18,500,000	교통소통/수목 자문비
다. 공급가액	8,711,573,637	9,123,662,728	412,089,091
22. 부가가치세	871,157,363	912,366,272	41,208,909
23. 물가변동조정금액	2,454,888,000	2,001,590,000	453,298,000	1회 ~ 7회
라. 도급금액	12,037,619,000	12,037,619,000	-
마. 관급자재비	3,102,780,000	3,102,780,000	-
바. 총공사비	15,140,399,000	15,140,399,000	-

❍ 3차 1회 주요 공사비 변경 현황

구분	금액			비고
	당초	변경	증.감
1. 공통공사	302,274,879	541,534,484	239,259,605
2. 토공	1,194,111,491	474,672	1,193,636,819
3. 배수공	-	-	-
4. 구조물공	-	431,014,707	431,014,707
5. 포장공	-	-	-
6. 부대공	-	-	-
7. 조경공사	-	178,879,483	178,879,483
가.직접공사비계	1,496,386,370	1,181,903,346	314,483,024
8. 간접노무비	37,408,933	51,609,665	14,200,732
9. 산재보험료	18,180,741	25,082,297	6,901,556
10. 고용보험료	3,636,148	5,016,459	1,380,311
11. 건강보험료	7,435,025	10,257,421	2,822,396
12. 노인장기요양보험료	486,994	671,861	184,867
13. 연금보험료	11,596,769	15,998,996	4,402,227
14. 퇴직공제부금비	10,755,068	14,837,778	4,082,710
15. 안전관리비	23,096,202	24,091,398	995,196
16. 하도급수수료	957,687	756,418	201,269
17. 기타경비	49,875,309	52,616,067	2,740,758
나. 순공사비계	1,659,815,246	1,382,841,706	276,973,540
18. 일반관리비	56,433,718	47,016,618	9,417,100
19. 이윤	133,751,036	112,874,076	20,876,960
20. 미확정설계공종	-	-	-	폐공 처리비
21. 제요율적용제외공종	-	18,500,000	18,500,000	교통소통/수목 자문비
다. 공급가액	1,850,000,000	1,561,232,400	288,767,600
22. 부가가치세	185,000,000	156,123,240	28,876,760
23. 물가변동조정금액	488,344,000	183,000	488,161,000	1회 ~ 7회
라. 도급금액	2,523,344,000	1,717,538,640	805,805,360
마. 관급자재비	-	52,206,340	52,206,340
바. 총공사비	2,523,344,000	1,769,744,980	753,599,020

(단위:원)

❍ 적용단가 검토

- 신규단가 중 표준시장단가는 2020년 하반기기준 100% 적용

- 품셈적용 단가는 공사용 진입가도, 교통규제협의 용역비는 낙찰률(79. 999%)을 적용하고 가설휀스, 가설 보도육교, 지장수목이식 및 제거는 협의율(89.999%) 적용

□ 검토결과

❍ 건설사업관리책임기술자 검토의견

- 상기와 같이 제경비 정산 및 실정보고 승인 사항에 대하여 적정성 검토 결과 암사초록길조성공사의 전체분 제4회(3차분 1회) 설계변경 수량 및 금액은 적정한 것으로 사료됨.

□ 조치의견

❍ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하여 암사초록길공사의 품질·안전 관리를 철저히하고 계획된 공정에 따라 공사 완료코자함.

붙  임 : 1) 암사초록길조성공사 설계변경 요청 1부.

2) 설계변경 수량 및 공사비 증·감 현황 1부. 끝.