“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	설계변경(1회) 계약의뢰[2020년 상수도 GIS DB 정확도개선사업(중부,서부)]

1. 우리본부에서 시행하는「2020년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(중부,서부)」에 대하여 다음과 같이 설계변경(1회)을 시행하고 계약의뢰합니다자.

가. 용 역 명 :  2020년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(중부,서부)

나. 용역기간(총차) :  2020. 4. 1. ~ 2021. 3. 31.

- (1차) 2020. 4. 1. ~ 2020. 12. 31.

다. 계 약 자 : ***********

라. 용역내용 : 상수도 시설물 측량 및 편집 104.1㎞

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	********	******	******	***
당 초	***********	***********	**********
변 경	***********	***********	**********
증 감	*	************	************

- 변경사유 : 물량증감에 따른 차수별 계약금액 변경[총 부기금액 변경없음]

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비(상수도 GIS 구축)

붙임  1. 설계변경(1회) 및 2차수 계약 시행 계획(2020년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업) 1부.

2. 설계변경 시행 방침 1부.

3. 설계변경(총차,1차) 내역서 각1부.

4. 합의문 1부.  끝.

	시설관리부장
주무관	강정구		공간정보과장	권승계		시설관리부장	12/03 代김형준
협조자
시행	공간정보과-7028	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02)3146-1554	/전송	02)3146-1529	/		/	부분공개(5)