문서번호	설비부-19406
결재일자	2020. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	김오열	12/04 이달영

『서울시네마테크 건립 기계 및 소방공사』

1차 준공기한 연기 검토보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(설비부)

「서울시네마테크 건립 기계 및 소방공사」

1차 준공기한 연기 검토보고

「서울시네마파크 건립 기계 및 소방공사」관련, 사업부지 인접건물 안전성 확보 등으로 인한 건설공사 지연으로 기계 및 소방공사 1차 준공기한을 연기하고자 검토 보고 드림

‣ 기계공사 1차 준공기한 : 당초 ’20.12.31. → 변경 ’21.9.30.

‣ 소방공사 1차 준공기한 : 당초 ’20.12.31. → 변경 ’21.9.30.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 기계, 전기통사

□ 위    치 : 서울특별시 중고 마른내로 38

□ 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,806,11㎡

□ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 근정

구분		계약금액	공사기간	도급사
기계	총차	**************	*********************	**** ****
	1차	***********	*********************
소방	총차	**************	*********************	**** ****
	1차	***********	*********************

Ⅱ		관련근거

□ 기계공사 1차계약 준공기한 연장 승인요청 : 근정시네 제2020-205호(2020.12.02.)

□ 소방공사 1차계약 준공기한 연장 승인요청 : 근정시네 제2020-208호(2020.12.02.)

Ⅲ		검토내용

□ 계약현황

□ 준공기한 연기사유

- 공사현장 인접건물 안전확보 등으로 인한 선행공정 지연으로 절대 공사기간 부족으로 기계 및 소방공사 1차 준공기한 연기가 필요함

□ 변경계약 내용

구분		계약금액		준공기한
		당초	변경	당초	변경
기계	총차	**************	****	**********	****
	1차	***********	****	**********	**********
소방	총차	**************	****	**********	****
	1차	***********	****	**********	**********

□ 건설사업관리기술자 의견

- 사업부지 인접건물 안전확보 등으로 건설공사 공정이 지연되었으며, 건축공사 변경공정계획에 따라 기계 및 소방공사 1차 준공기한을 연기하는 것이 적정하다고 판단됨

Ⅳ		조치계획

□ 건설사업관리단의 의견과 같이 기계 및 소방공사 1차 준공기한을 연기함이 타당하다고 판단되므로 총무부로 변경계약 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 :  건설사업관리단 검토의견서 각1부.  끝.