“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(안전총괄과장)
(경유)
제목	설계변경 심의요청[2020년 동작,영등포구 관내 시설물 설치 및 보수공사(장기계속)]

1. 우리사업소에서 시행중인『2020년 동작,영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(계약금액) 심의를 요청합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 동작,영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속 단가계약)

나. 계약기간 : 2020. 5. 1.~ 2020. 4. 30.

다. 계약금액 : 금675,233,000원

라. 계 약 자 : ***********

마. 설계변경 사유 : 현장여건 변화 및 소규모 상수도공사의 특수성으로 신규공종 및 계약 물량(증.감) 발생

바. 설계변경금액

구 분	계약금액		증.감	비 고
	당 초	변 경
도급비	675,233,000	718,858,000	43,625,000	6.5%

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액검증확인서 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	오영진		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	12/07 고신석
협조자
시행	시설관리과-22725	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/	oyj6802@seoul.go.kr	/	부분공개(6)