등록번호

서대문자연사박물관-6009

주무관

전시교육팀장

서대문자연사박물관장

복지문화국장

등록일자

2020.12.6.

황학빈

정종철

이남숙

12/08

송광덕

결재일자

2020.12.8.

공개구분

부분공개(5)

협  조

기획예산과장

강환복

예산팀장

기민희

주무관

성윤미

운영지원팀장

김세정

서대문자연사박물관

노후전시물 종합개선 추가사업 추진계획

서 대 문 구

서대문자연사박물관

서대문자연사박물관

노후전시물 종합개선 추가사업 추진계획

추 진 배 경
	2020년도 박물관의 노후된 전시물을 교체하기 위한 용역체결 후, 계약사항에 누락된 비대상 전시코너의 패널 디자인 통일, 안내 사인의 현대식 교체, 구식 전시코너 리모델링 등을 추가 진행하여 박물관 노후전시물 개선효과를 증대하고자 합니다.

Ⅰ	사 업 개 요

□ 사 업 명 : 노후전시물 종합개선 추가사업 추진계획

□ 추진기간 : 2021년 2~5월 중

□ 예산금액 : 금171,000,000원(금일억칠천일백만원)

□ 예산 현황

- 용역 계약체결 결과통보[자연사박물관 노후전시물 종합개선 용역](재무과-27459/20.11.16.)

예산과목	예산금액(재원)	기용역 계약금액	잔 액
다양한전시회개최 시설비	1,710,000,000원 (시비 100%)	1,539,000,000원	171,000,000원
합 계			171,000,000원

□ 주요 사업 내용

- 미개선 전시코너의 디자인 통일 및 시안성 증대한 안내 사인 설치

- 인포그래픽 및 영상을 활용한 인류의 진화코너 개선 등

Ⅱ	세부 사업 내용

□ 전시코너 패널

- 2020년 노후전시물 종합개선 용역에서 확정된 디자인(색상, 글씨체) 가이드 준수

- 미개선 코너(3층 및 2층 전시장) 패널 제작 후 전면 교체 시공

□ 안내 사인물 교체

- 기존 접착식 안내 사인(벽면, 바닥 스티커)의 급속한 오염과 노후로 전시장 미관 저하

- 비접촉식 장치(미니 빔 등)를 활용한 안내용 사인 개선설치

- 중앙홀 및 각 층 전시장의 주요 코너 및 지하/외부시설 안내 활용

□ 「인류의 진화」 전시코너 개선

- 최신 연구결과를 반영한 정보전달식 전시물 제작(마네킨 제외)

- 기후변화와 인류의 전세계 진출 관계 영상

Ⅲ	향 후 일 정

□ 2020. 12월 : 미필원인행위 및 사고이월

□ 2021. 2월 : 입찰 공고

□ 2021. 3~5월 : 계약 및 사업추진

Ⅳ	예 산 내 역

□ 예산과목 : 박물관 운영의 활성화, 창의적인 전시교육 운영, 다양한 전시회
개최, 일반운영비, 시설비

□ 소요예산 : 금171,000,000원(금일억칠천일백만원)