				★ ◎										본부장 방침 제673호
문서번호	기반시설부-4394			부 원			기반시설부장				도시공간조성처장			도시공간사업본부장
보존기간	30년																12/01
				김기홍			노병철				박영욱			박광균
결재일자	2020.12.01
공개여부	비공개(5)			협조
일상감사	대상아님
「동남권 유통단지 조성공사」
시설물 인수인계를 위한 설계용역 시행 검토 보고
		서울주택도시공사
( 도시공간사업본부 기반시설부 )

사전 검토항목

■ 해당사항이 있는 부분에 ‘√’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 의견 입력 가능)

구 분	사전 검토사항 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비고
사 회 적 가 치	▶ 사회적 가치에 관한 사항을 검토하였습니까? 예) 일자리 확대, 주민참여, 윤리경영, 노사상생, 지역사회 공헌활동, 사회적 약자배려, 청렴 등
고 객 만 족 도	▶ 고객만족도 향상을 검토하였습니까? 예) 고객 및 주민참여, 주거만족도, 하자관리 등
사전협의	▶ 이해당사자와 충분한 협의를 하였습니까? 예) 공사내 관련부서, 중앙부처, 시 자치구, 민간단체 등
전 문 가 자 문	▶ 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 변호사 등 전문가 자문, 자문위원회, 타당성 검토 등
업무개선	▶ 업무개선 사항이 있는지 검토하였습니까? 예) 법령개정, 제도개선 등
홍 보	▶ 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 설명회 등
안 전	▶ 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 시설물 점검, 재난·안전관리 등
통 합 경영공시	▶ 지방공기업법에 의한 경영정보 통합경영공시 항목에 해당하는지를 검토하였습니까? 예) 지방공기업법 제46조 제3항 및 시행령 제44조의 2
결재문서 공 개	▶ 공개여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호
바 른 우 리 말	▶ 불필요한 외국어․외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등

『동남권 유통단지 조성공사』

시설물 인수인계를 위한 설계용역 시행 검토 보고

우리공사에서 시행한  『동남권 유통단지 조성공사』 와 관련, 사업 구간 내 미인계 시설물의 관리청 인수인계 추진을 위하여 기반시설 보완공사 설계용역을 시행하고자 검토 보고함.

개   요

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 동남권 유통단지 조성공사

○ 공사기간 : 2005. 11. 8. ~ 2010. 11. 30.

○ 도 급 자 : 한라건설㈜

○ 공사금액 : 36,461백만원

○ 개발면적 : 560,694㎡
- 1공구(활성화단지) : 154,589㎡
- 2공구(이주단지)   : 145,067㎡
- 3공구(물류단지)   : 261,038㎡

추진 경위

Ⅱ

추진경위(요약)

○ 2005. 11. 08. : 동남권 유통단지 조성공사 착공

○ 2010. 11. 30. : 동남권 유통단지 조성공사 준공

○ 2012. 01. 13. : 장지교삼거리 입체화시설 건설공사 착공

○ 2015. 06. 23. : 동남권 유통단지(1,2공구) 인수인계 완료(송파구 도로과)

○ 2017. 04. 25. : 장지교삼거리 입체화시설 건설공사 준공

○ 2019. 12. 24. : 동남권 유통단지 조성사업 사업준공 신청(3공구)(SH→서울시)

○ 2020. 02. 03. : 동남권유통단지조성사업 준공신청 협의 회신(송파구 혁신도시기획과)

○ 2020. 06. 18. : 동남권 유통단지(3공구) 보수계획서 제출(송파구 도로과)

○ 2020. 07. 21. : 동남권 유통단지(3공구) 보수계획 협의(송파구 교통과)

○ 2020. 08. 03. : 동남권 유통단지(1,2공구) 보수계획서 제출(송파구 치수과)

○ 2020. 11. 12. : 동남권 유통단지(3공구, 대로1-74) 보수계획 협의(동부도로사업소)

현황 및 문제점

Ⅲ

인수인계 현황

○ 동남권 유통단지 조성공사 준공 이후, 장지교삼거리 입체화시설 건설공사 착공 및 동남권물류단지PF사업 공사로 인하여 1,2공구 인수인계 협의 우선 진행.

○ 동남권 유통단지(1,2공구) 도로 및 도로시설물은 우리공사에서 보수비용 납부 하고, 송파구에서 보수공사 등을 시행하는 조건으로 인수인계 완료.
[사장 방침 제342호(2015.04.20.)]

문 제 점

○ 동남권 유통단지(3공구)조성사업 사업준공을 신청(2019.12.)하였으나, 송파구에서 1,2공구 합동점검 당시 미인계 시설물 지적사항에 대한 조치결과 일부 미조치, 무리한 자료제출 등을 요구하며 3공구 합동점검 협의 지연.

○ 동남권 유통단지(3공구) 사업준공 일정이 촉박함을 감안하여 1,2공구 지적사항 조치결과를 조속히 회신 후 3공구 합동점검을 진행하고, 잔여 미인계시설물들의 지적사항을 일괄 조치하여 인수인계를 추진할 수 있는 조치방안 필요.

○ 미인계 시설물

구 분	시 설 물	관 리 청	미인계 구간
도로 시설물(시도)	- 차도 : 0.5km - 교통안전시설물	동부도로사업소 (도로보수과, 기전과)	3공구
도로 시설물(구도)	- 차도 : 0.8km - 보도 : 1.8km - 교통안전시설물	송파구 (도로과, 교통과)
상수도 시설물	상수도 : 1.5km	강동수도사업소
하수도 시설물	- 우,오수 : 1.5km	송파구(치수과)	1,2,3공구

○ 주요 지적사항(보완공사)
- 도로 시설물(시도) : 포장균열 → 표층(5cm)절삭 후 재포장
- 도로 시설물(구도) : 보도블럭 재설치, 차도 표층(5cm)절삭 후 재포장
- 상수도 시설물 : 합동점검 미시행
- 하수도 시설물

⦁1,2공구 : 일부 미조치(맨홀 물고임, 하수관 연결부위 보수 등)

⦁3공구   : 합동점검 미시행

시행 방안

Ⅳ

○ 미인계 시설물에 대한 전면적인 보완공사를 위하여 설계용역 시행.
- 용 역 명 : 동남권 유통단지 기반시설 보완공사 설계용역
- 용역기간 : 2020.12. ~ 2021. 02.
- 용 역 비 : 14,904천원(부가세 제외)

향후 추진계획

Ⅴ

○ 2020. 12. : 소규모 기술용역 타당성 심사

○ 2020. 12. ~ 2021. 02. : 보완공사 설계용역 시행 및 유관기관 협의

○ 2021. 03. ~ 04. : 보완공사 발주 및 업체선정

○ 2021. 05. ~ 08. : 보완공사 시행

○ 2021. 09. : 시설물 인수인계

붙임  1. 동남권 유통단지 보수계획평면도 1부

2. 내역서(동남권유통단지 기반시설 보완공사 실시설계용역) 1부.  끝.