문서번호	토목부-24079
결재일자	2020. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
강대호		진재섭	12/09 김용제
협조

“제2자유로 종점부 입체화공사”

사토장 선정(8차)에 따른 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사

사토장 선정(8차)에 따른 검토 보고

본 공사 지하구조물 설치를 위한 터파기시 발생한 토사를 당초 설계된 사토장으로 반출이 어려워 반출 가능한 사토장을 선정하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

※관련문서 : 사토장(8차) 선정 보고(제2자유입건 2020-434호, 2020.11.30.)

□ 공사 개요

○ 공사명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사

○ 위   치 : 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리

○ 규  모 : 지하차도 신설(폭4차로, 연장 540m/U-TYPE 290m, BOX 250m)

도로확폭(양방향 각 1개차로, 총연장 582m)

○ 공사기간 : 2019.08.01. ~ 2022.01.29.

○ 총공사비 : ******

****************************************************

○ 시공사/감리사 : 삼부토건주식회사 외 2/ 동부엔지니어링주식회사 외 2

□ 사토처리 계획

○ 설계 사토장

위 치	반출량	운반거리	운반속도	반입 조건
파주운정3지구 (파주시 다율동)	61,136㎥	32.22Km	30~50Km/H	양질 성토용

○ 위 치 도

□ 보고 내용

○ 본 공사 지하구조물공 터파기중 발생한 토사는 현장내 임시보관 장소가 없고 공사장 주변 부지 확보 어려워 현장 유용토로 활용이 어려운 실정임.

○ 설계 계획된 사토장인*********************************************함을 통보 받음.

*사토반입 여부 조회에 대한 회신(인천고양단지사업*******************)

○ 금회 발생 사토량 : 약8,000㎥ (계획)

□ 조치 방안

○ 당초 계획 사토장과 유사한 조건의 사토장을 물색하여 비슷한 거리의 사토장을 찾지 못하여 본 공사 지하구조물공에서 발생한 토사 반입 의사가 있는 사토장을 선정하여 처리코자 함.

○ 추후 설계변경시 사토장소 변경(처리단가 변경없음)에 따른 설계변경 사항을 반영코자 함.

<변경 사항>

구 분	당 초	변 경
****	*******	*******	************	*******
****	*******	*******	************	******
***	*******	*******	*******	******
*******	*******	*******	**************	*******
****			***********	*******

※ 사토운반단가는 기존 ************** 적용함

○ 위치도 및 전경사진

운반거리 60.9km 파주시 파평면 금파리 414-1

붙임  건설사업관리단 검토보고 1부.  끝.