문서번호	시설보수과-6238
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		代류춘광	07/31 조병준
협조

현장 실정보고사항 검토

(2013 개봉고가 보수공사, 철도구간 추가보수)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

현장 실정보고 사항 검토

“2013년 개봉고가차도 보수공사” 관련, 철도구간(S8~10) 보수방안 검토지시에 대하여

현장 실정보고 사항이 접수되어 검토 후 처리하고자 합니다.

∇ 관련문서: 시설보수과-5160호(‘14.6.27) “철도구간(S8~10) 보수방안 검토지시”

서울특별시 시설관리공단 공사감독1처-6781, 6769호 (‘14.7.29)

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : “2013년 개봉고가차도 보수공사-강서” (계약이행보증공사)

공사개요 : 바닥판 재포장 1,960㎡, 단면보수 85㎡, 공간비계 906㎡

(원계약 공사 중도타절 물량 : 바닥판 재포장 567㎡, 공간비계 260㎡)

공사기간 : 2014.4.28 ~ 2014.8.31.(원계약 ‘13.8.22~12.31)

공사금액 : 605,984,900원 (원계약 752,984,900원)

계 약 자(보증이행업체) : ㈜삼우아이엠씨 대표 김기헌, 대경건설산업(주) 대표 최덕순

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항

보고사항 : ‘철도구간 손상부위 보수방안 보수방안’에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계서 상 철도구간 바닥판하면(S8)에 대한 보수는 포함되었으나,     주형(가로보 포함, S8~S10) 및 교각(교좌장치 포함, P8~10)에 대한 보수는 미반영

- 본 공사를 위한 철도구간 단전기간에 철도구간 전체에 대한 손상 일제 보수 필요

※ 2013년 개봉고가차도 정밀안전진단용역(‘14.3.24 준공)의 외관조사망도 참고 현장 육안조사를 통한 물량 및 공사비 산출하여 본 공사에 포함 시행 검토

○ 검토내용(시설관리공단)

- 본 공사 철도구간 단전기간에 철도구간 손상부위 추가 일제 보수 시행

- 보수물량 조사결과

연번	보수공법	규격	수량	비고
1	단면보수	T=30mm, 야간, 철도	1.59㎡	주형(가로보) 교각 등
2	단면보수(철근노출)	T=30mm, 야간, 철도	0.76㎡	주형(가로보) 교각 등
3	강재재도장	철재면, 야간, 철도	20.74㎡	교량받침 20개소
4	균열보수	B=0.3mm, T=120mm 야간, 철도	14.62m	교각(P9)
5	표면보수	T=0.6mm, 야간, 철도	29.86㎡	교각(P9, 10)

- 개략공사비 : 4,081천원(직접공사비)

※ 철도구간 심야작업시 철도운행안전원, 열차감시원 배치(약 30만원/일)은 미반영됨

검토의견

○ 본 2013년 개봉고가차도 보수공사(계약이행보증공사)를 위한 철도구간 단전기간에 철도구간 손상부위 추가 일제 보수 시행이 타당함

※ 2013년 개봉고가차도 보수공사의 사고이월 재배정 예산 중 18백만원 추가 집행 가능

Ⅲ		처 리 의 견

시설관리공단의 실정보고 사항을 승인 처리하여 보수공사 추진에 만전을 기하고, 공사비 변동사항은 추후 설계변경시 정산 처리코자 합니다.

첨부 :  1. 현장 실정보고서(시설관리공단).

2. 철도구간(S8~10) 보수방안 검토지시(시설보수과)  끝.