아름다운 변화, 열린 구정, 행복도시 서대문
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	서대문보훈회관 신축공사(건축, 기계설비-2차) 설계변경 시행

1. 복지정책과-25177(2020.12.15.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진 중인 「서대문보훈회관 신축공사(건축, 기계설비-2차)」에 대한 설계변경을     아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 서대문보훈회관 신축공사(건축, 기계설비-2차)(장기계속)

나. 계약업체

1) 주계약자(건축) : ㈜두화공영(대표 : 박정희)

2) 부계약자(기계설비) : 광진ENS(대표 : 최기윤)

다. 계약변경내역

1) 2차 도급비 : (당초)금519,622,000원 → (변경후)금701,811,000원(증182,189,000원)

2) 총차 도급비 : (당초)금1,456,085,000원 → (변경후)금1,638,274,000원(증182,189,000원)

구분			계 약 금 액(단위 : 원)			비고
			변경전	변경후	증‧감액
도급비	2차	공급가액	472,383,637	638,010,000	165,626,363
		부가세	47,238,363	63,801,000	16,562,637
		계	519,622,000	701,811,000	182,189,000
	총차	공급가액	1,323,713,637	1,489,340,000	165,626,363
		부가세	132,371,363	148,934,000	16,562,637
		계	1,456,085,000	1,638,274,000	182,189,000

라. 설계변경 사유

1) 외벽 마감재(테라코타패널) 사급자재 전환 및 외벽 창호 주위 차수 후레싱 추가

2) 승강기(엘리베이터)의 사양 및 제원이 사급자재로 이에 맞는 관급자재 구매가

불가하여 사급자재로 변경

3) 수도계량기 이설 및 가스배관 차단과 지하 흙막이공사의 간섭으로 인한 이설

4) 장애물 없는 생활환경 인증을 위한 정면 보도블록 및 경계석 등 추가 반영

5) 원가계산서 상의 미사용 제경비 일부 정산 후 변경

마. 준공 시 산업안전보건관리비 정산예정

라. 예산과목 : 복지정책과, 맞춤형 복지 서비스 제공, 종합 복지서비스 체계 구축,

보훈회관 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

(설계변경에 따른 소요예산은 당해연도 예산으로 집행)

붙임 :  검토보고서 등 관련서류 각 1부. 끝.

주무관							박동섭			복지행정팀장					곽태성					복지정책과장					代곽태성						복지문화국장					송광덕
부구청장							12/17 서영관
협조자				주무관						유현임					계약팀장							이향란					재무과장								박춘식
기획재정국장							임근래
시행			복지정책과-25306									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 248															/			http://www.sdm.go.kr
전화		02-330-1277						/전송			02-3140-8377					/	pddds@sdm.go.kr														/	부분공개(5)