투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경 의뢰 (2020년 서울시 안전속도 5030 교통안전표지 설치공사)

1. 우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2020년 서울시 안전속도 5030교통안전표지설치공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2020년 서울시 안전속도 5030교통안전표지설치공사

나. 공사위치 : 남부도로사업소 관내

다. 공사내용 : 교통표지판 교체 1식

라. 계약금액 : ****************************

마. 계약업체 : *************

바. 계약기간 : ‘20. 7. 8. ~ 12. 31.

사. 설계변경내역

1) 설계변경금액

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증▪감 액
도급비	공 급 가 액	65,145,182	64,272,728	-872,454
	부가가치세	6,514,518	6,427,272	-87,246
	계	71,659,700	70,700,000	-959,700

2) 설계변경사유 : 현장여건에 따른 물량 증·감 발생

아. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화,

교통사망사고줄이기사업, 시설비

붙   임 : 1. 합의각서 1부.

2. 설계변경서 1부.

3. 설계변경검토 보고서 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	이태근		기전과장	석대창		남부도로사업소장	12/22 변봉섭
협조자
시행	기전과-7544	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 남부도로사업소 (대림동)	/
전화	02-3284-5433	/전송	02)3284-5470	/	hermen@seoul.go.kr	/	부분공개(6)