투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(진접선 차량기지 건설공사 임목폐기물처리용역(1,2공구), 총차1회,1차1회)

1. 우리부에서 시행중인 「진접선 차량기지 건설공사 임목폐기물처리용역(1,2공구)       (장기)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 1회, 1차1회)을 시행코자 하오니       조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 진접선 차량기지 건설공사 임목폐기물처리용역(1,2공구)

나. 도 급 비 : 금309,723천원(1차: 금11,990천원)

다. 공사기간 : 2019.11.28.~ 2020.12.31.(1차: 2019.11.28.~ 2020.12.31)

라. 계약상대자 : 에이치에너지(주) 박현희

마. 계약변경 내역                                        (단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
총차 1회	계약금액	309,723	310,061	증 338	스마트송장 단가변경
	공사기간	2019.11.28.~ 2026.02.26	2019.11.28.~ 2026.02.26	변경없음
1차 1회	계약금액	11,990	12,650	증 660	스마트송장 단가변경 및 물량조정
	공사기간	2019.11.28.~ 2020.12.31	2019.11.28.~ 2020.12.31	변경없음

바. 설계변경 사유

○ 스마트송장 관리시스템 운영비 단가변경 적용 : 운반비×1.5%→톤당 180원

○ 차량기지내 벌목 등 현장여건에 따른 실처리 물량 정산(1차)

사. 예산과목

○ 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선연장)

차량기지 건설, 시설비 및 부대비, 시설비

- 사고이월  11,990천원,  2020년 예산  660천원

붙임 : 1. 설계변경 검토보고 1부

2. 책임건설사업관리기술자 검토의뢰서 1부

3. 설계변경 내역서(총괄 1회)

4. 설계변경 내역서(1차 1회)

5. 합의각서 1부. 끝.

	도시철도토목부장
주무관	안상훈		토목2과장	임병길		도시철도토목부장	전결 12/16 최병훈
협조자	주무관	임경태		주무관	노권호
시행	도시철도토목부-13457	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/
전화	027727222	/전송	02)772-7306	/	aasshh902@seoul.go.kr	/	부분공개(5)