투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신림선 도시철도 토목분야 공정회의(´20년 12월) 결과 알림

1. 도시철도사업부-11753호(2020.12.04.)와 관련입니다.

2. 신림선 건설공사의 적기 완공을 위해 실시한 [´20년 12월 토목분야 공정회의] 결과를 알려드리니, 회의시 논의된 사항이 이행될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회의결과

1) 사업시행자

∘ 가장 늦은 108정거장(´21.1월말 완료)은 공정 준수를 위해 후속공종 병행 추진

∘ 12월 21일 차량 반입(2편성 6량) 대비 현장청소 등 선행작업 시행 등 준비 철저

∘ 주행로 균열 발생에 대하여 전문가 자문을 실시하여 ‘원인 분석 및 대책’ 마련 예정

∘ 우선 시운전시 안전확보를 위해 PSD 설치 등 구간내 유입 인원 차단 조치 시행

∘ 실시계획 변경(4차)은 조속히 관계 분야 협의하여 금년내 승인 요청 예정

2) 본부 요청사항

【공사·공정관리 분야】

- ´21.01.23. 예정된 우선시운전 일정에 차질 없도록 토목분야 공정관리 철저

- 주행로 균열 등 우선시운전 착수에 지장 없도록 시공 품질 관리 철저 당부

- 실시계획 변경건(4차)은 개통일정 변경 없는 범위내 공정계획 검토, 총사업비 변경건은 E&M분야 등 관계 분야와 원활히 협의하여 적기 추진 요망

【안전관리 분야】

- 안전사고는 공정지연으로 귀결되므로 화재 예방 및 취약공종(가시설 해체 등) 중점 관리

- 크레인 등 지상작업시 시민불편사항 발생치 않도록 적정 관리(장비 유도원 배치 등) 요망

- 우선시운전 착수전 ‘안전·전기’ 등 관련 분야 전문가 합동점검을 통한 안전확보 필요

붙  임 : 통합공정 회의자료 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	남서울경전철(주) 대표이사 귀하,신림선 1~4공구 책임감리원 귀하,신림선 1~3공구 현장대리인 귀하
주무관	정영호		공정관리과장	최문기		도시철도사업부장	12/22 이철
협조자	주무관	이덕배		주무관	박형복		신림선과장	권영민
시행	도시철도사업부-12316	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 9층 도시철도사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7162	/전송	02-772-7305	/	elete123@seoul.go.kr	/	대시민공개