문서번호	도시철도토목부-14064
결재일자	2020. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김민수		代안상훈	12/30 최병훈
협 조
	주무관			代안상훈

「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사 」

차량 진·출입로 민원 관련 검토 보고

2020. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사』

차량 진·출입로 민원 관련 검토 보고

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사』추진 중 책임건설사업관리기술자로부터 제출된 현장 민원에 대한 검토 보고임

- 관련근거 : 서현감 차량기지2공구 2020-761호

1		사업개요

❍ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사

❍ 위     치 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 일원, 서울시 노원구 상계동

❍ 규     모

- 진접차량기지 : 차량기지 197,400㎡, 진입도로 1.14km

- 창동차량기지 : 차량기지 179,578㎡(건축물 및 입출고선)

❍ 공사기간 : ‘18.12.31~’26.02.26

❍ 도 급 비 : 금117,677백만원(제2차 2,180백만원)

❍ 시 공 사 : 현대엔지니어링㈜ 외 1개사

❍ 감 리 사 : ㈜서현기술단 외 4개사

2		현장 실정보고 내용

❍ 민원내용

- 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 206 및 180-2번지 보도부 차량진·출입로 개설 요청

❍ 민원검토

- 금곡리 206번지(STA.0+035, STA.0+065지점) 주차장으로 진·출입을 위한 보도부 진입로 개설필요

- 금곡리 180-2(STA.0+655) 음식점 주차장 진·출입을 위한 보도부 진입로 개설필요

❍ 추진경위

구 분		내 용
2020.05.26 ~ 2020.06.03	민원요청 접수 (민원인→남양주시→도기본)	• 금곡리 206번지 일원에 주차장 진출∙입을 위한 보도부 진입로 개설 요청(이준영씨 민원)
2020.06.04	민원사항 알림 (도시기반시설본부-20-6577) (차량기지2공구 2020-252)	• 민원에 대한 검토 요청
2020.06.08	민원사항 검토의견 (진접차량2공구-2020-209)	• 금곡리 206번지 일원의 주차장 진출∙입을 위해 Sta.0+035 및 Sta.0+065지점(2개소)에 보도부 진입로 개설
2020.10.15	민원요청 접수 (민원인→도시기반시설본부)	• 금곡리 180-2번지 일원 주차장으로 진출∙입하기 위한 보도부 진입로 개설 요청(이해남씨 민원)
2020.11.07 ~ 2020.11.09	민원사항 알림 (도시기반시설본부-20-13680) (차량기지2공구 2020-612)	• 민원에 대한 검토 요청.
2020.11.12	민원사항 검토의견 (진접차량2공구-2020-468)	• 차량기지 진입도로 개설 전부터 주차장으로 활용하고 있는 부지로 Sta.0+655지점에 보도부 진입로 개설

❍ 남양주시 도로관리과 협의결과

- 차량용 투수블럭(T=8cm)은 일반 투수블럭(T=6cm)과 동일 재질이면 문제없으며, 하부구조는 남양주시 표준도(TYPE-2)에 비해 동등이상이면 설치에 문제없음

❍ 진접읍 금곡리 206번지(STA.0+035, STA.0+065) 평면도

	주차장 진입로(1)
	주차장 진입로(2)

❍ 진접읍 금곡리 180-2번지(STA.0+655) 평면도

❍ 설치 단면도

당초		변경

❍ 공사물량 검토

구 분	철거 및 공사물량				비 고
	개 요	물 량
		당초	변경	증감
투수블럭 포장(T=6cm)	주차장 진입로 3개소 반영에 따른 보도포장 수량변동 (8.0(L)X2.65(B)X3개소)	2,565.0㎡	2,501.0㎡	64.0㎡	T=6.0㎝
투수블럭 포장(T=8cm)		-	64.0㎥	64.0㎡	T=8.0㎝

❍ 공사비 산정

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 • 감		비 고
	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
직접공사비		38,031		38,208		177
1-B 차량기지 진입도로		38,031		38,208		177
1-4 길내기		38,031		38,208		177
1-4-2-3 보도포장		38,031		38,208		177	주차장 진입로 반영
투수블럭포장(T60)	2,565㎡	38,031	2,501㎡	37,082	64㎡	949
투수블럭포장(T80)	-	0	64㎡	1,126	64㎡	1,126
간접공사비		11,850		11,910		60
공급가액		49,881		50,118		237
부가가치세		0		0		0	영세율
도급비		49,881		50,118		237
관급자재비		65,320		65,842		522	부가세 포함
폐기물처리비		0		0		0	부가세 포함
총공사비		115,201		115,960		759

❍ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 금곡리 206번지 및 180-2번지는 주차장으로 민원인이 남양주시청으로부터 도로점용허가를 받는다는 전제조건으로 설치가 가능함

- 차량진·출입로 설치에 서울시 보도공사 설계 및 시공 매뉴얼을 적용하여 남양주시 기준보다 기능성이 높고 향후 유지관리에 문제가 없으리라 사료됨

- 주차장 진·출입을 위한 보도부 차량진입로 설치에 대해 발주처 승인 후 설계변경 시 반영코자 함

3		조치의견

❍ 남양주시 도로 인수인계 시 보도품질을 유지하기 위하여 개인 사유지 진·출입로에 대해 선 시공 필요(도로 인계 예정일 2021.5월)

❍ 설계도면 상 도로점용구역 표시하여 추후 파손 시 개인이 복구해야함

❍ 더불어 책임건설사업관리기술자의 검토의견과 같이 안전사고 예방 및 품질 확보를 위한 우선공사는 적정하다고 판단되므로 승인코자 함

붙임  관련문서 1부.  끝.