급수공사 연기 보고서(개량-83)

시 행	급수운영과-161
시행일자
수 신 자	내부결재
접 수
접수일자
공개구분	대시민공개

주무관		급수운영팀장	급수운영과장			결재
곽미숙		임인택	01/06 한희선
협 조

명에 의거 방이동 외 14개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 공사 현황

○ 공사명: 2020년 방이동 외 14개동 상수도공사

○ 계약상대자: 주식회사 경도아이앤디  대표 박남선

□ 연기 내역

○ 지시번호

연번	주 소	지시번호	당초	변경	비 고
1	가락동 146	개량-83	2020.12.23.~ 2021. 1. 5.	2020.12.23.~ 2021. 1. 15.	중대로 시도구간 굴착허가 지연

○ 연기사유

- 송파구청 도로점용(굴착,복구) 허가처리 지연으로 급수공사 일정 연기

‣ 도로굴착 점용기간 : 20201. 1. 15.(금)

□ 지체상금 부과여부

○ 지체상금 미부과

□ 조치의견

○ 도로굴착 점용기한내 급수공사 완료하도록 공사기간을 변경하여 연기 끝.