실정보고 검토서

공 사 명

반포천 유역 분리터널 건설공사

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 서초구 법원로 10

~ 사평대로 240일원

· 규    모 : 유역분리터널

(▣4.5×4.5~D7.1m,  연장 1,162m)

· 공사기간 : '18.2.1.~'22.3.31.

· 도 급 비 : 38,482백만원

· 시공사 : (주)호반산업외 1개사

· 건설사업관리 :

㈜도화엔지니어링외 2개사

· 설계사 : ㈜제일엔지니어링외

2개사

실정보고 건명

스마트송장 관리시스템 도입외 1건 실정보고-반포사관 제2021-012호((2021.01.12.)

실정보고

사    유

사토처리 스마트송장 관리시스템 도입

터널 라이닝 철근 작업대차 안전성 검토비용 반영(건설기술진흥법 제62조)

건설사업관리자

검  토  의  견

스마트 송장 관리시스템 (사토) 도입 및 가설구조물 안전성 검토비용을 설계에 반영함이 타당

공  기  에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당 초	변 경	비 고(증·감)
규모	*	********** ****************	************* *******************
공사비	***	*******	*********

예산조치

계    획

당초 도급비 범위내 시행가능( ), 당초 사업비 범위내 시행가능(○) 별도(추가) 예산 확보 필요( )

추가 행정절차 이행 필요여부

없음

발 주 처

검토의견

건설사업관리자 의견과 같이 사토 스마트 송장 관리시스템 도입 및 가설구조물 안전성 검토를 진행하고 추후 설계변경시 반영하고자 함

비     고

결재

담당

김재건

과장

손창익

부장

01/12

박홍봉