				★차장			팀장	상가운영처장	복지경제본부장
문서번호		상가운영처-19555
보존기간		준영구		협 조			총무처장
결재일자		2019.12.31.					기획조정실장
공개여부		공개
2019년도 예산 사고이월 계획
			2019. 12
						상가운영처

2019년도 예산 사고이월 계획

< 예산사고이월 사업 총괄 : 4건 >

사 업 명	완료시기	항 목	이월금액(원)
지하도상가 편의시설 설치공사	20.12	수탁자산취득비	1,257,433,813
신당 지하도상가 도시가스시설 개선 공사	20. 3	기타수선유지비	96,018,518
지하도상가 내진성능 보강공사 실시설계용역	20. 3	기타수선유지비	76,005,790
강남터미널지하도상가 장비반입구 폐쇄공사	20. 1	기타수선유지비	32,184,000

Ⅰ	지하도상가 편의시설 설치공사

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교통약자와 이용시민의 편의 증진 및 상가활성화 도모

○ 사업내용 : 청계6가 지하도상가 에스컬레이터(800형 4대)

○ 사업기간 :  계약일로부터 ~ `20. 12. 30.(12개월)

○ 사업예산 : 1,461,400,000원

□ 이월사유

○ 관련근거 :

- 상가운영처-17750(19.12.03)호「청계6가 지하도상가의 편의시설(에스컬레이터) 설치계획보고」

○ 이월사유             ※ 상인들의 영업 지장 초래로 공사기간 12개월 소요

- 청계6가 지하도상가 편의시설설치공사는 ‘19년도 예산으로, 市 교통운영과와 청계6가   상인회 협의 지연으로, 2019년도에 사업종료가 불가능하므로 2020년으로 예산 이월‧시행

□ 사고이월 조치계획

구 분	사업금액(A) (지출원인행위액)	선급/기성금(B) (예상액)	사고이월액 (A-B)
금 액(원)	1,305,933,813	48,500,000	1,257,433,813

○ 사업금액 세부 내역

- 토목․건축․기계공사 : 1,175,181,000원(관급비+자동제어공사비 포함)

※ E/S 공사비(1,040,338,000원), 관급비(44,357,000원), 자동제어공사비(90,486,000원)

- 전기공사 : 63,406,910원(도급비 57,820,910원, 한전수용신청비 5,586,000원)

- 통신공사 : 8,438,903원

- 폐기물처리용역 : 10,407,000원

Ⅱ	신당 지하도상가 도시가스시설 개선 공사

□ 사업개요

○ 사업목적

- 지하도상가 내 가스배관 노출(높이 : 1.8m)에 따른 가스폭발 등 위험성 상존으로 가스설비 전면 철거 실시

○ 사업내용 : 전기용량증설․전기기기 설치․가스설비 전면철거

○ 사업기간 : 2020.1.1. ~ 3.10

○ 사업예산 : 금140,000,000원

□ 이월사유

○ 관련근거

- 상가운영처-16812(’19.11.18)호『안전한 지하도상가 조성을 위한 신당지하도상가 도시가스시설 개선 계획(안)』

○ 이월사유

- 지하도상가 도시가스설비 철거 시 가스사용 점포(식음료) 영업 불가에 대한 점포주와의 협의로 공사착수 지연

※ 전기‧철거공사기간 약 2개월 소요 → 연내 사업 완료 어려움

□ 사고이월 조치계획

(단위 : 원)

구 분	사업금액(A) (지출원인행위액)	선급/기성금(B) (예상액)	사고이월액 (A-B)
금 액(원)	96,018,518	-	96,018,518

○ 사업금액 세부 내역

- 전기공사 : 62,993,988원

- 전기기기(지원) : 24,926,000원

- 가스철거공사 : 8,098,530원

Ⅲ	지하도상가 내진성능보강공사 실시설계용역

□ 사업개요

○ 사업목적 : 내진성능 미확보 지하도상가*에 대한 내진성능 보강공사 추진

* 내진성능 미확보 지하도상가 : 청계5가,인현,마전교,남대문,종각,영등포시장

○ 사업내용 : 내진성능보강 공법제시 및 실시설계

○ 사업기간 : 2019. 9. 23. ~ 2020. 3. 31.

○ 사업예산 : 금76,005,790원

□ 이월사유

○ 관련근거

- 총무처-27011(’19.11.28)호,『용역 변경계약체결 알림(2019년 지하도상가 내진성능 보강공사 실시설계용역)』

- 상가운영처-17392(’19.11.27)호,『용역 실정보고(2019년 지하도상가 내진성능 보강공사 실시설계용역)』

○ 이월사유

- 과업수행에 필요한 기초자료 부족으로 추가 과업 발생, 이에 따른 수행기간 필요

□ 사고이월 조치계획

(단위 : 원)

구 분	사업금액(A) (지출원인행위액)	선급/기성금(B) (예상액)	사고이월액 (A-B)
금 액(원)	76,005,790	-	76,005,790

○ 사업금액 세부 내역

- 내진성능 설계용역비 : 2,965,909천원*×4.36%×60% = 77,588천원

☞ 부가세제외 총 공사비의 설계요율 적용

*총 공사비(VAT포함): 3,262백만원(내진보강2,300백만원+인테리어962백만원)

※공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토해양부고시 제2015-911호)

- 계약금액 : 76,005천원(‘19.9.23 계약체결)

Ⅳ	강남터미널지하도상가 장비반입구 폐쇄공사

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지상부(도로) 장비반입구의 노후 및 부식으로 누수 등이             우려되어 장비반입구를 영구 폐쇄 하고자 함

○ 사업내용 : 장비반입구 콘크리트 타설로 영구 폐쇄

○ 사업기간 : `19. 12. 5. ~ `20. 1. 20.

○ 사업예산 : 금32,184,000원

□ 이월사유

○ 관련근거 :

- 상가운영처-13314(19.09.10)호「강남터미널 지하도상가 장비반입구 폐쇄 및 구조물 보강계획」

○ 이월사유

- 장비반입구가 도로 위에 있어 동절기 콘크리트 타설 시 양생기간 추가 확보 필요

- 장비반입구 덮개인 이중 철판 철거 시 줄용접, 부식 등으로 추가 작업 기간 소요

□ 사고이월 조치계획

구 분	사업금액(A) (지출원인행위액)	선급/기성금(B) (예상액)	사고이월액 (A-B)
금 액(원)	32,184,000	-	32,184,000

○ 사업금액 세부 내역

- 계약금액 : 32,184,000원(‘19.12.04 계약체결)