문서번호	방재시설부-488
결재일자	2021. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
김재건		손창익	01/13 박홍봉
협조

「반포천 유역 분리터널 건설공사 건설폐기물처리용역」

설계변경 (총차1회·2차1회) 검토보고

2021.01.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

「반포천 유역 분리터널 건설공사 건설폐기물처리 용역」

설계변경 (총차1회·2차1회) 검토보고

「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」건설폐기물 반출 물량 증가에 따른 설계변경 검토 보고드림

※ 관련문서 : 건설폐기물처리용역 설계변경 도서(전체1회,2차1회) 제출-반포사관 2021-015호

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사 건설폐기물처리용역

○ 용 역 사 : ㈜하경엘씨, 백상기업(주)

○ 용역규모 : 폐기물 운반 및 처리 1,349톤

○ 총용역비 및 용역기간

구 분	총 차 분	1차분(준공)	2차분(금차분)
총용역비	38,723천원	20,000천원	18,723천원
용역기간	`18.04.30.~ `21.01.29.	`18.04.30.~ `19.07.29.	`19.07.30.~ `21.01.29.

□ 보고내용

○ 설계변경 사유

- 시설공사 설계변경(총차4회)에 따른 폐기물 물량 증가

- 시설공사 공기연장에 따른 건설폐기물처리 용역(총차) 준공기한 연기

○ 용역기간 변경사항

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
전체분	`18.04.30.~ `21.01.29.	`18.04.30.~ `22.03.31.	증)14개월
2차분	`19.07.30.~ `21.01.29.	`19.07.30.~ `21.01.29.	변경 없음

○ 수량 증·감

구 분		단위	당 초	변 경	증․감	비 고
전체분	폐콘크리트	ton	692	2,300	1,608
	폐아스콘	ton	657	1,468	811
2차분	폐콘크리트	ton	453	1,032	579
	폐아스콘	ton	203	16	-187

○ 용역비 증·감

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
전체분	38,723,000	107,813,000	69,090,000
2차분	18,723,000	29,623,000	10,900,000

□ 책임건설사업관리기술인 검토의견

○ 기 설계변경된 건설폐기물 증가 수량 내역대로 설계변경함이 적절함.

□ 조치의견

○ 책임건설사업관리기술인의 검토의견이 적절하다고 판단되며, 설계변경 시행 및 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.