투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제 목	교통신호기 원인자부담 공사기간 연장 요청(제2자유로 종점부 입체화)

1. 서부도로사업소 기전과-14524(`19.12.26)호와 관련입니다.

2. 위 호로 『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사(신호)』 교통신호기 원인자공사 승인 받은 사항에 대하여, 공사기간이 연장되어 변경승인 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사(신호)

나. 공사위치 : 마포구 월드컵경기장 사거리 일대

다. 공사기간

당 초	변 경	연기사유
`19.12.26~`21.7.30	`19.12.26~`22.01.30	선행공정(토목) 공사기간 연장

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	오삼록		설비부장	01/15 김중영
협조자
시행	설비부-691	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	대시민공개