투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남서울경전철(주) 대표이사 귀하
(경유)
제목	신림선 104정거장 환기구 및 본선환기구 덕트 단면 변경 관련 검토의견 회신

1. 남서울 2021-32(2021.1.13.)호와 관련입니다.

2. 신림선 경전철 민간투자사업(1공구) 건설공사와 관련 104정거장 환기구(배기) 및 본선환기구(104-2) 덕트 단면 변경 관련 검토 의견을 아래와 같이 회신하오니 원활한 사업추진을 위해 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 검토 의견

- 104정거장 환기구 및 본선환기구 덕트 단면 변경에 따른 관련 설계도서(변경) 확정 후 공사시행.

- 실시협약 제13조(총사업비의 변경)에 따라 총사업비 변경 대상이 아니며 향후 증감되는 공사비는 총사업비 내에서 정산 처리.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안태현		신림선과장	권영민		도시철도사업부장	01/19 이철
협조자	주무관	조규영
시행	도시철도사업부-576	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7305	/		/	부분공개(5)