등록번호

여성가족과-1790

주무관

보육행정팀장

여성가족과장

복지문화국장

등록일자

2021.1.20.

이상희

권기영

송월섭

01/20

강환복

결재일자

2021.1.20.

공개구분

부분공개(5)

협  조

【구립산마루어린이집 지붕 및 환경개선 공사】

설계변경(정산) 및 준공기한 연기 검토 보고

서 대 문 구

여성가족과

【구립산마루어린이집 지붕 및 환경개선 공사】

설계변경(정산) 및 준공기한 연기 검토 보고

『구립산마루어린집 지붕 및 환경개선공사』와 관련하여 공사시행에 따른 자재물량변동 및 폭설, 한파로 인한 공사중단으로 아래와 같이 설계변경(정산) 및 준공기한 연기를 통하여 해당 어린이집 공사에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	관련 근거

□ 2020년 구립어린이집 소규모 보수비 지원 계획(여성가족과-3569호, 2020.1.31.)

□ 현장실정보고 제출[*******, 2021.1.19.]

Ⅱ	공사 개요

□ 공 사 명 : 구립산마루어린이집 지붕 및 환경개선 공사

□ 공사기간 : 2020. 12. 28. ~ 2021. 1. 25.

□ 총공사비 : 금91,065,980원

□ 계 약 자 : ***************

Ⅲ	설계 변경(정산) 내용

□ 설계변경 및 정산 사유

□ 공사시행에 따른 자재물량 변경 : 낙화물방지방, 우레판판넬

□ 산재보험료 등 정산 및 도로점용비용 추가

□ 설계변경(정산)에 따른 총공사비 변동 : 감 31,355원

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	91,065,980	91,034,625	감 31,355

□ 설계변경(정산) 반영 내역

비 목			당초 금액	변경(정산)금액	증·감(-)
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	38,612,848	38,694,490	81,642
		간 접 재 료 비
		작업설, 부산물(△)
		[소 계 ]	38,612,848	38,694,490	81,642
	노 무 비	직 접 노 무 비	29,506,385	29,576,915	70,530
		간 접 노 무 비	2,360,510	2,366,153	5,643
		[소 계 ]	31,866,895	31,943,068	76,173
	경 비	기 계 경 비	2,515,826	2,516,780	954
		산 재 보 험 료	1,188,635	1,191,476	2,841
		고 용 보 험 료	277,241	277,904	663
		퇴직 공제 부금비	678,646	680,269	1,623
		산업안전보건관리비	1,995,893	2,000,352	4,459
		환 경 보 전 비	211,905	0	-211,905
		기 타 경 비	1,057,196	1,059,563	2,367
		하도급지급보증수수료	57,214	0	-57,214
		건설기계대여금지급보증서발급수수료	49,444	0	-49,444
		[소 계 ]	8,032,000	7,726,344	-305,656
계			78,511,743	7,726,344	-305,656
일 반 관 리 비			785,117	783,639	-1,478
이 윤			1,497,747	1,489,201	-8,546
폐 기 물 처 리 비			1,992,648	1,992,648	0
도 로 점 용 비			0	129,360	129,360
공 급 가 액			82,787,255	82,758,750	-28,505
부 가 가 치 세			8,278,725	8,275,875	-2,850
도 급 액			91,065,980	91,034,625	-31,355

□ 설계변경(정산) 내역

(단위 : 원)

공 종	변 경 개 요			변 경 내 용	증·감(-)
	당초	변경	증/감(-)
낙화물방지방	70㎡	160㎡	90㎡	설치면적 증가	956,520
선홈통설치	30m	0	-36m	기존상태 양호하여 재사용	-1,409,904
루프드레인설치	6개소	0	-6개소	기존상태 양호하여 재사용	-536,130
우레탄판넬	116㎡	131㎡	15㎡	설치면적 증가	1,142,640
도로점용비	없음	추가	-	도로점용으로 인한 비용발생	129,360
간접비 증가	없음	증가	-	직공비증가로 인한 간접비 (고용‧산재보험료, 환경보전비 등) 증가	-313,841
합 계					-31,355

Ⅳ	준공기한 연기

□ 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
날짜	2021. 1. 25.(월)	2021.2.8.(월)	14일 연기

□ 연기 사유 : 폭설, 한파로 인한 공사 중단 및 어린이집 운영일정 등을 감안하여 공사기간 연장

□ 연기 귀책 : 도급자(계약자)의 책임 없는 사유에 해당

□ 지연배상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 시공사 실정보고 및 준공기한 연기요청(공문) 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 준공기한 연기의뢰서 1부.

6. 설계변경(정산) 및 준공기한 연기 사유서 1부.

7. 도로점용비 부과고지서 1부.  끝.