보 고 서
			담당	팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호	도로관리처-14388
보존기간	준영구		협 조	선임
결재일자	2020.12.23.
공개여부	공개
제목	설계변경(정산)보고 (자동차전용도로 소파보수 긴급공사 및 폐기물처리용역)

1				공 사 현 황

□ 공 사 명 : 자동차전용도로 소파보수 긴급공사

□ 공사기간 : 2020년 10월 13일 ~ 2020년 12월 31일

□ 도 급 액 : 902,947,430원

□ 공사개요 : 소파보수 A=5,992.5㎡, 부대공 1식

□ 도 급 자 : 수암산업개발(주) 대표 문광호

2				보 고 내 용

□ 주요설계변경사유

1) 실 시공수량 반영에 따른 계약수량 증·감

[도로관리처-13796호(20.12.14), -14016호(20.12.16), -14357호(20.12.23)]

2) 추가공사에 따른 포장수량 증가

[도로관리처-12943호(20.11.26)‘낙찰차액 사용계획 보고’]

[市도로시설과-13339호(20.12.03)‘낙찰차액 사용계획 검토회신’]

3) 보험료 및 제경비 정산

□ 주요공종별 수량변경 현황

1)공사

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
소파보수(토공, t=5cm)	B-Type (110㎡/day)(야간)	㎡	1,290	1,711	(증) 421.0
소파보수(토공, t=10cm)	B-Type (55㎡/day)(야간)	㎡	4,555	5,027	(증) 472.0
소파보수(지하차도, t=10cm)	C-Type (45㎡/day)(야간)	㎡	77.5	239	(증) 161.5
공사안내간판	1200*2400mm	개	8	32	(증) 24
공사안내간판 설치 및 철거		회	104	109	(증) 5
폐아스콘 상차비	굴삭기:0.7㎥, (주간)	㎡	527	607	(증) 80

2)폐기물

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
폐아스콘(운반·처리)	덤프트럭 24ton+굴삭기0.7㎥	톤	1,238	1,426	(증) 188

3)관급자재

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
아스콘	WC-2(13mm, 공장상차도)	톤	1,247	1,405	(증) 158

□ 설계변경금액 현황

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총사업비		983,770,930원	1,115,244,600원	증)	131,473,670원
도급비	공급가액	820,861,300원	921,704,200원	증)	100,842,900원
	부가가치세	82,086,130원	92,170,420원	증)	10,084,290원
	계	902,947,430원	1,013,874,620원	증)	110,927,190원
관급자재비		63,664,600원	81,613,980원	증)	17,949,380원
폐기물처리비		17,158,900원	19,756,000원	증)	2,597,100원

※ 배정예산 : 1,115,244,600원

3				조 치 계 획

□ 상기와 같이 설계변경하고 총무처에 변경계약 의뢰

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.