		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	구 다농부지 청과직판 EGI 설치공사 계약변경 3차

1. 관련문서

가. 시설운영팀-501(‘20.02.13.), 「구 다농부지 청과직판 EGI설치공사 시행」

나. 재무팀-5085(2020.10.30.), 「변경계약 체결내역 알림[구 다농부지 청과직판 EGI 설치공사(2차)」

다. 도매권임대팀-1425(‘20.11.24.), 「청과직판 임시매장 철거 및 주차장 조성 일정 관련 알림」

2. 『구 다농부지 청과직판 EGI설치공사』의 준공기한이 다가옴에 따라 당초 공사의 목적 달성을 위해 계약기간 연장(3차)을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 계약현황

◦ 계 약 명: 구 다농부지 청과직판 EGI 설치공사

◦ 계 약 자:

◦ 계약금액: 20,086천원(기성집행액 13,970천원, 집행잔액 6,116천원)

◦ 계약기간: ‘20.02.17.~’20.12.31.

나. 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 감
계약금액	20,086천원	좌동	변경없음
계약기간	‘20.02.17.~’20.12.31.	‘20.02.17.~’21.04.30.	증) 120일

다. 변경사유

◦ 구 다농부지 청과직판 명도 관련 소송 1심 선고가 당초 ‘20.11.24.로 예정되었으나, 21.01.12.로 새로운 변론일이 잡혀, 명도집행은 내년 3~4월에 가능할 것으로 판단된다는 도매권임대팀의 의견을 반영하여 구 다농부지 청과직판 EGI휀스 존치기간을 2021.04.30.까지 연장

라. 예산조치: 없음

마. 향후 계획

◦ 계약기간 연장에 따른 변경계약 추진 - 재무팀

붙임	1.	관련문서	............	1부
	2.	합의서	............	1부
	3.	구 다농부지 청과직판 EGI 설치공사 추진 현황	............	1부
	4.	일상감사 요청서	............	1부.	끝.

결재의견입력부

★담당자						팀장				건설안전본부장		12/03
		김동영						신종철			임창수
협조자	차장		정영준										감사실	감사필

시행			시설운영팀-4671				(2020.12.03)			접수				()
우	138-701			서울특별시 송파구 양재대로 932								/	http://www.garak.co.kr
전화		02-3435-0646			전송	02-3435-0394		/	kdy89man@garak.co.kr					/	공개

붙임 3

구 다농부지 청과직판 EGI 설치공사

□ 추진경과

◦ ‘20.02.17.   공사계약
- 계약기간: ‘20.02.17.~’20.08.14. / 계약금액: 20,086천원

◦ ‘20.02.26.   EGI 휀스 설치 완료(2.20~2.26)
- 409m

◦ ‘20.06.16.   기성 청구 및 지급(1회)

- 기성액 13,970천원 / 누계기성액 13,970천원, 기성율 69.5%

◦ ‘20.08.11.   변경계약 체결(1차)

- 계약금액 동일, 계약기간(준공기한) 당초 ‘20.08.14. 변경 ’20.10.30.

◦ ‘20.10.28.   변경계약 체결(2차)

- 계약금액 동일, 계약기간(준공기한) 당초 ‘20.10.30. 변경 ’20.12.31.

붙임 4

일상감사 요청서

건 명

구 다농부지 청과직판 EGI 설치공사 계약변경 3차

1. 공사개요

○ 공사명: 구 다농부지 청과직판 EGI 설치공사

○ 계약기간: ‘20.02.17.~’20.12.31.

○ 계약금액: 20,086천원

○ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 감
계약금액	20,086천원	좌동	변경없음
계약기간	‘20.02.17.~’20.12.31.	‘20.02.17.~’21.04.30.	증) 120일

○ 변경사유

- 구 다농부지 청과직판 명도 관련 소송 1심 선고가 당초 ‘20.11.24.로 예정되었으나, 21.01.12.로 새로운 변론일이 잡혀, 명도집행은 내년 3~4월에 가능할 것으로 판단된다는 도매권임대팀의 의견을 반영하여, 구 다농부지 청과직판 EGI휀스 존치기간을 2021.04.30.까지 연장

2. 자체 검토의견

가. 사업의 추진배경 및 필요성

○ 구 다농부지 청과직판 잔류자들의 이전과 빈 점포 사용 방지 및 안전사고 예방을 위해 이전점포(빈점포)에 EGI 휀스를 설치했으며, 미이전자들의 이전까지 설치된 휀스의 유지 필요성이 발생

나. 사업의 적정성(관련규정 검토)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제75조1항

다. 기대되는 효과

○ 구 다농부지 미이전자들의 이전 가능성을 높이고, 발생할 수 있는 안전사고 방지