				★ ◎
문서번호	에너지사업부-235			부 원			에너지사업부장				에너지기술사업처장
보존기간	30년											01/22
				박수정			박철규				허원
결재일자	2021.01.22
공개여부	공개			협조	부 원			권학준		부 원			김수경
일상감사	대상아님
에너지 취약계층의 에너지복지 실현을 위한
2020년도 세대용 미니태양광 보급결과 보고
		서울주택도시공사
(에너지기술사업처 에너지사업부)

에너지취약계층의 에너지복지 실현을 위한

2020년도 세대용 미니태양광 보급결과 보고

우리 공사에서 관리중인 아파트 임대세대 거주 에너지취약계층에 대한 에너지복지 실현을 위하여 추진한 “2020년도 태양광 미니발전소 보급사업”을 시행 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

○ 2020년 서울특별시 베란다형 태양광 미니발전소 보급사업 공고

- 서울특별시 공고 제2020-421호(2020.01.07.)

- 서울특별시 베란다형 태양광 미니발전소 변경공고(2020.07.16.)

○ 2020년도 태양광 미니발전소 보급사업 계획(안)

- 서울주택도시공사 본부장 방침 제 191호, 에너지사업부-1503(2020.06.01.)

○ 태양광 미니발전소 관련 자문위원회 개최

- 2020년도 태양광 미니발전소 보급방법 결정(2020.05.28.)

○ 관리주체(센터) 및 보급업체와 설치관련사항 협의

- 관리주체(센터) 담당자와 회의(2020.07.20.)

- 보급사업 참여업체(14개사) 대상 회의 개최(2020.06.22.~26.)

○ 참여업체와 협약 및 사업시행 안내

- 태양광 설비 표준 납품설치 협약(2020.07.17.)

- 2020년도 태양광 미니발전소 보급사업 시작(2020.07.24.)

Ⅱ		추진개요 및 방향

■ 추진개요

○ 목표수량: 총 9,000 세대

○ 설치대상

- 우리공사에서 관리중인 임대주택(아파트, 다가구 등) 중 관리주체(관리사무소 등)의 동의를 받은 단지 중 설치를 원하는 세대

○ 설치조건: 가급적 남향 세대로서 일조량이 충분한 세대

- 서울특별시 공고 제2020-421호

○ 보급업체: ㈜유앤알 외 13개 업체

○ 설치제품: 베란다거치형 태양광 미니발전소 1장 (310,325,335W)

○ 설치금액 및 자부담금(1대 기준)

구 분 (설치용량)	총 설치금액	서울시 보조금	지자체 보조금	자부담금 (SH부담금)	비 고
310W	472,000원	334,800원	-	94,000원	-
325W	489,000원	351,000원	-	99,000원	-
335W	511,000원	361,800원	-	109,000원	-

■ 추진방향

○ 지역배정 방법 : 외부전문가 포함된 자문위원회를 거쳐 지역분배방식으로 설치

○ 설치가능 요건

- 설치조건이 부적합한 세대(일조시간 3.2시간미만 등)는 설치금지

- 설치 전 관리주체(관리사무소/입주자대표회의)의 동의 후 사업진행

- 빛 반사 및 조망권 저해 등 민원 발생의 우려가 없는 세대

○ 설치사진

외관사진(위례포레샤인23단지)	인버터	내부설치사진	전선마감 및 플러그 설치

Ⅲ		추진실적

■ 2020년 추진실적

설치연도	계 획	실 적	비 고
2020	9,000	2,272	코로나19로 인한 비대면 정부정책 및 신축 아파트 준공기한 연기로 인하여 설치수량 감소

■ 모듈용량별 설치현황

설치용량	계	아파트 유형		비 고
		택 지	재 개 발
계	2,272	1,935	337
310W	333	73	260
325W	1,870	1,803	67
335W	69	59	10

※총 설치수량 대비 2%(46세대) 모니터링 계기 설치완료

■ 연도별 설치현황(누계)

구 분	추진실적(연도별)							비고
	계	2015	2016	2017	2018	2019	2020
설치수량(기)	47,326	464	3,209	7,448	22,927	11,006	2,272

※센터별 업체별 설치현황 첨부파일 참조

■ 추진결과

○ 2020년도 목표수량 대비 25.2% 달성

- 코로나19의 장기화로 인하여 비대면 생활의 정부정책에 따라 태양광 미니발전소 사업 홍보를 위한 대면접촉에 어려움 발생

- 보급사업을 7월부터 시행하였으나 장마기간이 길어지면서 보급사업 시기 지연됨

- 코로나19로 인한 신축 아파트의 준공기한 연기로 인하여 목표수량 대비 실적이 다소 부족함

- 2019년도까지 4만5천여기 보급으로 신규설치 가능세대가 많지 않음

○ 서울시 소유 재개발 임대아파트 대상으로 보급사업 추진

- 서울시 소유 재개발 임대아파트까지 확대 보급하여 재개발아파트 거주자 에너지복지 혜택 제공

■ 추진 시 문제점

○ 코로나19로 인한 대면접촉 어려움 발생

- 코로나19로 인하여 대면접촉을 꺼리는 세대 다수 발생하여 태양광 미니발전소 홍보 및 설치에 어려움 발생

○ 관리주체 미동의로 설치 불가능 세대 발생

- 우리공사에서 관리하는 임대아파트 중에서 설치여건을 만족하나 관리주체가 동의하지 않는 단지 발생

Ⅳ		기대효과

■ 기대효과

○ 우리공사 임대주택에 거주하는 에너지취약계층에 대한 에너지복지 실현

- 세대당 최대 월 9,000원 전기요금 절감

※ 태양광 미니발전소 설치 후 평상시 210kW 전력량을 사용하는 세대

- 연간 전기요금 절감액: 245,376천원/년(9,000원×12월/년×2,272기)

○ 신재생에너지설비의 보급 확대로 에너지 전환 정책기여

- 연간 발전량: 862,451kWh(325W×2,272기×3.2h×365일/년)

- 연간 온실가스감축량: 382 tco2

○ 서울특별시 “2022 태양의 도시, 서울” 정책기여

Ⅴ		행정사항

○ 2020년도 설치현황을 시설물 관리부서에 통보(시설관리처 및 해당센터)

○ 2020년도 사업 추진 시 개선이 필요했던 사항을 관련 기관(서울시, 서울에너지공사)와 공유하여 2021년도 사업 추진 시 개선사항에 반영할 수 있도록 협력 필요

- 코로나19로 인하여 대면접촉 없이 신청을 받을 수 있는 방안 모색

- 관리주체 동의를 받기 위한 방안 모색

붙임  1. 2020년 보급업체별 설치현황 1부

2. 2020년 지역별 설치현황 1부.  끝.