문서번호	토목부-1699
결재일자	2021. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이준범		박일연	01/26 김용제
협조

고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 간접비 청구 검증 심의위원회 개최 계획

2021. 01.

도시기반시설본부

(토목부)

간접비 청구 검증심의위원회 개최계획(서면심의)

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 -

『고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사』 1차공사 기간연장에 따른 계약금액(간접비) 조정요청에 대하여 간접비 검증심사위원회 개최계획(서면심의)를 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 간접비 청구 업무절차 검토(토목부-3535호, ’20.02.20)

□ 코로나 19관련 지방계약 관련 각종위원회 개최시 유의사항 통보(행안부 회계제도과-852, '20.02.26.)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사

□ 규    모: 고덕교 차도확장(4차로→6차로), 교량접속 캔틸레버 보도 설치
(교량 양측 각 B=2.5m)

□ 사업기간: ’19.01.18. ~ ’21.06.30.

□ 도 급 비: 2,754백만원(1차 2,050백만원)

*□*********************

*□**********************

Ⅲ		현 황

□ 계약금액 조정 발생현황(1차 공사)

당 초	변 경	변경사유	비고
'19.01.18. ~ '20.01.17	'19.01.18. ~ '20.12.31 [연장 : 11개월(349일)]	다수의 지하매설물 저촉 에따른 보도교 공법변경과 지장매설물 이설지연 등	간접비 청 구

□ 추진경위

〇 '20.11.13. : 공기연장에 따른 계약금액(간접비) 조정요청(시공사→도기본)

〇 '20.11.16. : 공기연장 계약금액(간접비) 조정요청 건 검토지시(도기본→감리단)

〇 '20.12.10. : 간접비 청구건 전문기관 적정성 검토보고서 제출(감리단→도기본)

〇 '20.12.10.~12.11. : 간접비 청구 자체검토회의 개최(서면검토회의)

Ⅳ		검 토

□ 간접비 산출금액 비교

구 분	산출기준	산출금액			비 고
		시 공 사	감 리 단	전문기관
********	****	***********	***********	***********
******			*
*******	****	*********	*********	*********
*******	**********	*********	*********	*********
*******	**********	*********	*********	*********
*******	****	*********	*********	*********
*******	****	*********	*********	*
*******	****	*********	*********	*
***		***********	***********	***********
********	*******	**********	**********	**********
******	*******	**********	**********	**********
****		***********	***********	***********
*****	*******	**********	**********	**********
********	****	*********	*********	*********	*****
*****		***********	***********	***********

□ 간접비 검토결과(감리단, 한양경제경영연구소)

〇 대상인원 중 공사담당 투입개월 조정(10월→6개월), 작업반장 노무비 제외

〇 공사연장과 관련이 없는 도서인쇄비 및 지급수수료(이중계상) 전액 삭감

〇 승률계상 항목들은 도급내역서 원가계산서 상 기준요율 적용

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

〇 1차 준공대가 수령 전 시공시에서 제출한 공기연장에 따른 간접비 청구건을 검토한 결과 한양경제경영연구소 검증용역 결과가 타당하다고 판단됨.

〇 공사비가 증액되는 공사로 “신의 공평의 원칙”에 의거 상호협의하에 적정선에 지급함이 바람직하다고 판단됨.

Ⅴ		내부 검토회의 개최결과

□ 자체 검토회의 개최

〇 일    시 : ‘20.12.10(목)~12.11(금)

〇 심의방법 : 서면회의

〇 참 석 자 : 6명

- 토목부장, 토목총괄과장, 터널건설과장, 교량건설과장, 토목설계과장, 도시고속도로과장

□ 검토회의 결과(서면)

〇 공기연장에 따른 간접비 청구 및 간접비 산출 검토결과는 적정한 것으로 판단되며, 최근 판결 참조하여 공사비 증액을 감안 산출(검토)금액의 20%을 감액하여 지급하는 것이 적정하다고 판단됨

〇 간접비 검증 심의위원회를 개최하여 최종 의결

Ⅵ		간접비 청구 심의위원회 개최(서면심의)

□ 심의위원 선정

〇 분야별(법률, 원가분석, 건설분야 등) 6인 선정

연번	소속	분야	직위 및 성명	비 고
1	*******	**	*******
2	*******	****	******
3	*********		******
4	************	***********	********
5	***************		********
6	**	******	*******
7	*****		******

□ 심의위원회 개최

〇 안   건  : 간접비 청구에 따른 산출 적정성 심의

〇 심의방법 : 서면심의(심의위원별 검토의견서 전자우편 제출)

- 코로나19 확산방지를 위해 행정안전부 공직사회 코로나19 방역관리 강화 방안 및 서울시 사회적 거리두기 상향에 따른 회의실 운영지침에 근거 서면심의

〇 심의일시 : 2021.01.27.~02.02.(5일간)

(단위 : 천원)

시공사 요청금액	감리단 검토금액	전문기관검토금액	결정금액 (전문기관의 80%)	비 고
*******	*******	*******	*******	*********** **********

※ 최근 다수의 간접비 소송에서 공사비 증액이 발생한 경우 “신의 공평의 원칙”에 의해 청구금액의 20%를 감액하는 내용으로 판결하고 있음

□ 상기 결정금액을 시공사 및 감리사에 통보하여 도급비에 반영 정산하고자 함.

□ 간접비 심의위원회 개최 완료후 각 심의위원별 수당지급코자함.

붙임  1. 내부위원 검토의견서 각 1부.

2. 간접비 청구건 전문기관 적정성 검토보고서 제출 공문.  끝.