등록번호

안전치수과-1489

주무관

하수팀장

안전치수과장

안전건설교통국장

부구청장

등록일자

2021.1.26.

홍승지

양규철

박종하

이경우

01/26

서영관

결재일자

2021.1.26.

공개구분

대시민공개

협  조

치수팀장

서재영

2021년 하수 ․ 치수사업 추진 계획

서 대 문 구

안전치수과

2021년 하수 ․ 치수사업 추진 계획

우리 구 2021년 하수·치수 추진사업을 적기에 발주하여 체계적인 공정관리를 통해 안전사고 예방 및 시공품질을 확보하여 주택침수 및 주민불편사항을 신속히 해소하고 환경개선 및 삶의 질 향상에 기여코자 함

Ⅰ		추진방향

○ 주민생활 불편해소와 직결되는 연간단가공사는 우선발주

○ 하수도 및 하천 정비공사는 1~2월중 조기발주 예정

○ 상반기 중 60%이상 자금 신속집행에 노력

Ⅱ		추진계획

○ 하수도 및 하천 유지관리 등 : 23건------20,336백만원

연 번		사 업 명	사 업 개 요	추진계획		담당	비 고
				발 주	시행
총 계		23건	20,336백만원 (국1,000, 시13,426, 구5,910)
하수팀	소계	14건	13,373백만원 (시11,373, 구2,000)
	1	신촌 현대백화점 일대 하수암거 개량	하수암거 확대개량 ▣2.5×2.5m@2 → ▣2.7×2.5m@2, L=157.8m	2월	‘21.3월 ~ ‘22.12월	홍승지
	2	동교배수분구(연희,창천) 하수관로 종합정비공사-3차	하수관 개량 D300~900mm, L=1,730	2월	3월 ~ 12월	김 환
	3	서대문경찰서 주변 원형관로 보수	하수관 비굴착 전체보수 D450~1,350mm, L=771m	2월	3월 ~ 12월	정소라
	4	북가좌초등학교 일원 하수관로 개량	하수관 개량 D300~600mm, L=400m	2월	3월 ~ 12월	홍승지
	5	추계예술대학교 주변 하수관로 개량	하수관 개량 D450~1,100mm, L=333m	2월	3월 ~ 12월	정소라
	6	연희로5길 62-16 주변 외 2개소 하수관로 보수보강	하수관 비굴착 전체보수 D450~1,000mm, L=244m	기발주	3월 ~ 12월	홍승지
	7	2021년도 관내 하수구조물 보수공사(연간단가)	하수관 개량 D300~800mm, L=1,130m 빗물받이 280개소 등	1월	2월 ~ 12월	이주영
	8	동교배수분구(연희,창천) 하수관로 종합정비공사-2차	하수관 개량 D300~800mm, L=550m	기발주	‘20.4월 ~ ‘21.5월	김 환

하수팀	9	성산로 313 ~ 321 일원 사각형거 개량	하수암거 확대개량 ▣1.0×1.0m → ▣1.2×1.0m L=125m	기발주	‘20.9월 ~ ‘21.4월	김 환
	10	모래내시장 먹자골목 주변 사유지통과 하수암거 이설 기본 및 실시설계	- 기본 및 실시설계 L=236m	2월	3월 ~ 6월	정소라
	11	남가좌3-3 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	기본 및 실시설계 L=5.3km	2월	‘21.3월 ~ ‘22.12월	이주영
	12	30년 도래 노후 하수관로 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계 L=9.4km	2월	3월 ~ 12월	이주영
	13	2020~2021년 서대문구 하수도분야 전문감리용역	건설사업관리용역 1식	기발주	‘20.3월 ~ ‘21.12월	김 환
	14	2020년 관내 사각형거 정밀 안전점검 및 실시설계 용역	정밀안전점검 L=14.654km	기발주	‘20.7월 ~ ‘21.2월	홍승지

연 번		사 업 명	사 업 개 요	추진계획		담당	비 고
				발 주	시행
치수팀	소계	9건	6,963백만원 (국1,000, 시2,053, 구3,910)
	1	하천 유지관리 및 시설물 정비공사(연간단가)	- 하천시설물 유지관리 1식 하천청소, 취수정, 하천준설	기발주	1월 ~ 12월	정요셉
	2	유진상가 ~ 홍은중앙소공원 간 물빛로드 조성	1차구간 : 홍제교~홍전교 2차구간 : 홍은대교~홍은중앙소공원 캔틸레버형 보행로 및 경사로 설치(L=690m)	기발주	‘20.6월 ~ ‘21.6월	김건우
	3	2021년 지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가)	옥내역류방지기 200개소 물막이판 600m	2월	3월 ~ 12월	유현진
	4	홍제천 진출입시설 경관개선 및 정비	백련교~홍제3교 일원 경사로 3개소(B=4m, L=30m), 철재계단 2개소(B=3m, L=20m)정비	2월	3월 ~ 12월	김영민
	5	홍제천 보행약자용 진출입 경사로 설치	홍남교 일원 진출입경사로 설치(B=2m, L=65m)	2월	3월 ~ 12월	김영민
	6	백련교~홍제3교 간 보행데크 설치 타당성 조사 용역	백련교~홍제3교 일원 타당성조사용역 1식	1월	2월 ~ 4월	김건우
	7	불광천 해담는다리 공연장 관람석 및 주변 정비	불광천 해담는다리 공연장 일원 관람석 정비(B=18m, L=5m), 진입계단 보수(B=3.55m, H=5m), 주변 보행로, 자전거도로 등 보수 1식	2월	3월 ~ 12월	김영민
	8	관내 하수도 준설공사 (연간단가)	- 하수관 준설 4,000㎥	1월	2월 ~ 12월	김건우
	9	관내 빗물받이 및 연결관 준설공사(연간단가)	- 빗물받이 준설 25,000개소 - 연결관 준설 1,000개소	1월	2월 ~ 12월	김건우

Ⅲ		행정사항

○ 현장측량 등 시설물 수량산출 및 설계도서 작성

○ 신기술 등 특정공법 적용현장은 자체공법심의회 심의 후 설계서 작성

○ 공사 발주 전 계약원가 심사 및 일상감사(서울시 계약심사 및 자체심사) 이행

○ 폐기물 처리 및 GIS DB구축 용역은 관련공사 예산에서 사용

붙 임 : 하수․치수팀 사업별 현황 1부.   끝.