문서번호	설비부-1307
결재일자	2021. 1. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양성옥		여인웅	01/28 김중영
협조

「강남순환도시고속도로(8공구) 전기공사」

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2021. 1.

도시기반시설본부

[설비부]

「강남순환도시고속도로(8공구) 전기공사」

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『강남순환도시고속도로(8공구)전기공사』와 관련 건설사업관리단에서 관급자재 납품기한 연기에 관한 서류가 접수되어 검토 후 보고 드림

Ⅰ		관련근거

관급자재 납품기한 연장 보고(강남순환도시고속도로(8공구))

[책임건설사업관리단 동기강 2021-029(2021.01.28.)호]

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 전기공사

공사위치 : 서초구 우면동~과천시 주암동~서초구 양재동
공사내용 : 염곡동서지하차도(L=640m) 전기공사 1식,

매헌지차하도(L=900m) 전기공사 1식, 가로등 공사 1식,

교통신호기 공사 1식 등

(염곡동서 지하차도 19.12.31.개통, 매헌지하차도 20.12.31.개통)

공사기간 : (총차)`16.02.17.~`24.12.31. **************************

도 급 비 : (총차)4,429백만원, ************

시 공 사 : ㈜광성기업 외1

감 리 사 : ㈜동명기술공단

Ⅲ		검토내용

관급자재 납품기한 연기

□ 납품기한 연기 사유

- 선행공정 지연에 따른 전기공사 공기 연장으로 관급자재 납품시기 미도래

□ 납품기한 연기 내용

구 분	품명 (납품요구번호)	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당 초	변 경
****	****** ******************	*******	**********	**********	**********
	****** ******************	*****	***********	**********	**********
	****** ******************	*****	**********	**********	**********
	****** ******************	***	***********	**********	**********
	****** ******************	*****	***********	**********	**********
	**** ******************	*******	**********	**********	**********
	******* ******************	*******	**********	**********	**********

Ⅳ		검토의견

책임건설사업관리기술자가 요청한 관급자재 납품기한 연기에 대해 검토한 결과 전기공사 공기 연장에 따라 납품기한을 연기하는 것이 타당하여 총무부에 관급자재 납품기한 변경을 요청하고자 함.

붙임 : 관급자재 납품기한 연장 보고(감리단) 1부.  끝.