문서번호	설비부-1927
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
박희준		김은덕	02/09 김중영
협조

『G밸리 근로자문화복지센터 건립 전기·통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2021. 2.

도시기반시설본부

(설비부)

『G밸리 근로자문화복지센터 건립 전기·통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리부에서 추진중인「G밸리 근로자문화복지센터 건립공사」에 대한 관급자재(태양광발전설비 외 3건)의 납품기한을 연기코자 보고드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 관급자재(비상발전기) 납품기한 변경 검토보고(G밸리 문화복지센터 전기공사)

: PC G밸리 제*******01호(2021.01.29.)

□ 관급자재(수배전반) 납품기한 변경 검토보고(G밸리 문화복지센터 전기공사)

: PC G밸리 제*******02호(2021.01.29.)

□ 관급자재(출입통제설비) 납품기한 변경 검토보고(G밸리 문화복지센터 통신공사)

: PC G밸리 제*******01호(2021.02.01.)

□ 관급자재(전관방송장치) 납품기한 변경 검토보고(G밸리 문화복지센터 통신공사)

: PC G밸리 제*******02호(2021.02.01.)

Ⅱ
		공 사 개 요

□ G밸리 근로자문화복지센터 건립전기공사

○ 공 사 명 : G밸리 근로자문화복지센터 건립 전기공사

○ 공사기간 : (총차) 2018.04.03.~2021.09.30.

○ 도 급 비 : (총차) 1,050,194,000원

○ 시 공 사 : ㈜ 아이엔아이 대표 이상우 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링,(주)무영씨엠건축사사무소

□ G밸리 근로자문화복지센터 건립통신공사

○ 공 사 명 : G밸리 근로자문화복지센터 건립 전기공사

○ 공사기간 : (총차) 2018.04.03.~2021.09.30.

○ 도 급 비 : (총차) 529,095,386원

○ 시 공 사 : ㈜세빛전자통신 대표 이상호

○ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링,(주)무영씨엠건축사사무소

Ⅲ
		검토 내용

□ 납품기간 연장사유

○ 전기공사 및 통신공사 준공기한 연기에 따른 납품자재(설치)시기 미도래

※ 전기,통신 공사기간 변경(준공기한 연기)사항

구 분	변경 전	변경 후	비고
전기공사(총차)	2018.04.03.~2021.02.15.	2018.04.03. ~ 2021.09.30
통신공사(총차)	2018.04.03.~2021.02.15.	2018.04.03. ~ 2021.09.30

나. 관급자재 계약현황 및 납품기한 연기내용 (※세부계약 내역 붙임2 참조)

번호	계약번호	품 명 (규격)	계약자 (납품요구번호)	납품기한		금액	비고
				당초	변경
*	***********	***** *******************	*********	***********	***********	********** *********
*	***********	************	******	***********	***********	*********** *********
*	***********	*************	*********	***********	***********	********** *********
*	***********	****** *****************	********	***********	***********	********** *********

※ 관급자재 수량 및 금액 변동 없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ
		보고자 의견

○ 전기공사 및  통신공사(총차) 준공기한은 2021. 9.30. 로 연기됨에 따라 해당 관급자재 납품(설치)시기 미도래

○ 건설사업관리단으로부터 검토보고 된 해당 관급자재 납품기한 연기 검토내용이 적정하다 판단되어, 2021.09.30.로 연기 의뢰코자 함.

붙   임 : 1. 관급자재 납품기한 변경 검토의견서 각 1부.

2. 분할납품요구 및 통지 각 1부. 끝.