문서번호	설비부-1695
결재일자	2021. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
표창구		김은덕	02/05 김중영
협조

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사』

관급자재(물탱크) 납품기한 및 TAB 용역기한 연장 검토보고

2021. 02.

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사』

관급자재(물탱크) 납품기한 및 TAB 용역기한 연장 검토보고

『G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사』와 관련하여 감리단으로부터 제출된 관급자재(물탱크) 납품기한 및 TAB 용역기한 변경(연장) 요청 건에 대하여 검토보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : G밸리 근로자 문화복지센터 건립 설비공사

□  규    모 : 지하2층/지상10층, 연면적 5,958m2

□  공사기간 : `18.4.17~`21.2.15(1차:`18.4.17~`21.2.15)

※ 설비공사(1차) `21.5.31일로 공기연장 예정

□  공 사 비 : 2,036,946천원(1차 : 719,115천원)

□  감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링 건축사사무소(총괄)

㈜무영씨엠건축사무소(기계, 소방)

□  시 공 사 : ㈜다원이엔에스(설비), 대한엔지니어링주식회사(소방)

동명건설(주)(가스), 브티엘네이처 주식회사(개인하수처리시설)

2		관련근거

□  PC G밸리 제*******03호(2021.02.02.) : 관급자재 납품기한 및 TAB 용역기한 연기 검토보고

3		납품기한 및 용역기한 변경내용

□  납품기한 및 용역기한 변경 내용

(단위 :원)

품 명	납품요구번호 /계약번호	계약금액	납품기한		비 고
			변경전	변경후
물탱크	****************	18********	`21.02.09	`21.03.21	계약금액 변경없음
TAB 용역	20191*******01	19,320,000	`21.02.15	`21.09.30	“

□  연기사유 : 선행 건축공사 연장(지연)에 따른 납품자재(설치) 및 용역 시기 미도래

4		보고자 조치의견

□ 건설사업관리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 관급자재 납품기한 및 용역기한를 조정하여 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 1부.  끝.