문서번호	급수운영과-2311
결재일자	2021. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
강은수	이일로	이용구		02/10 박병성
협 조
	시설관리과장		고신석
	주무관		윤안식
	주무관		서장원

2021년 하수관내 상수도관 정비계획

2021. 2. 8.(월)

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2021년 하수관내 상수도관 정비계획

하수관에 저촉되는 상수도관을 이설하여 하수 흐름을 원할히 하고 상수도관의 부식 및 누수방지로 깨끗한 아리수 공급에 기여하고자 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 하수도법 제24조, 제80조 4항 4호

□ 하수도법 제19조 제5항, 제75조 제2호

□ 2021년 하수관내 상수도관 정비계획

○ 본부 누수방지과-1073(2021. 1. 28.)

Ⅱ		2020년 추진실적

□ 하수관내 상수도관 정비실적                               (단위 : 개소)

구분	정비목표					정비실적					비고
	계	동작구	영등포구	관악구	금천구	계	동작구	영등포구	관악구	금천구
대상	10	4	2	3	1	4	1	2		1
정비 완료	-	-	-	-	-	4	1	2	-	1	-
장기 대상	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
미정비	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	-

※ 장기대상은 이설이 불가하여 구청과 협의 이설대상에서 제외코자 하며, 미정비 건은 2021년 이설공사 예정.

□ 하수관내 상수도관 정비현황

연번	위치	유수장애 개요		정비현황
		상수도 규모	하수도 규모	일자	내용
1	시흥동 923-86	D=80㎜	⌽450mm	20.07.30	L=6m 이설완료
2	사당동 250-1	D=100㎜	⌽600mm	20.06.30	L=4m 이설완료
3	신길동 115-33	D=200㎜	⌽600mm	20.04.30	L=6m 이설완료
4	당산동1가 185-3	D=200㎜	⌽500mm	20.08.30	L=6m 이설완료

Ⅲ		2021년 추진계획

□ 정비 대상

○ 본부관리 하수관내 상수도관 정비대상 : 6건(2021.1.28.)

연번	위치	유수장애 개요		비고
		상수도 규모	하수도 규모
1	상도동 373-72	D=50㎜	⏴2.5x4.8	이설공사 예정
2	상도동 262-1	D=40㎜	⏴1.5x1.5	이설공사 예정
3	신림동 319-5	D=150㎜	⌽800mm	이설공사 예정
4	대방동 401-12	D=20㎜	⏴2.3x1.6	이설공사 예정
5	봉천동 1664-1	D=500㎜	⏴4x3	장기관리 대상
6	봉천동 1665-6	D=200㎜	⏴4x3	장기관리 대상

※ 정비대상에 대하여 자치구 및 유관기관 등과 합동 조사를 실시하여 정비시행

○ 예산액 : 60,000천원

□ 정비 기간 : 연중 실시

○ 자치구에서 하수도 탐사 등으로 추가 발견되는 정비대상은 예산한도

내에서 당해 연도에 정비하고 예산 부족시 2022년도에 정비

□ 정비 내용 및 방법

○ 하수도(복개천) 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

○ 하수관내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

○ 이설공간이 협소한 경우에는 별도 관망형성 등 정비방안 수립하여 절단

○ 자치구에서 통보된 유수장애 상수도관은 현장조사 후 확인하여 정비

○ 귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 후 상수도관 이설 및 정비

Ⅳ		행 정 사 항

□ 추진실적 보고

○ 본부 누수방지과에 당월 이후 추진실적을 매 분기(6.9.12월) 말일까지 보고

- 정비완료 후 해당 자치구에 통보하고 대장 및 관리카드를 정리하여 제출

- 자치구에서 추가 통보되는 대상이 있을 경우 월보에 포함하여 제출

붙임  1. 2021년 하수관내 상수도관 정비계획 1부.

2. 2020년 유수장애 상수도관 추진실적 1부.

3. 2021년 유수장애 하수관내 상수도관 정비대상 1부.

4. 하수관내 상수도관 정비계획 관리카드 양식 1부.

5. 유수장애 상수도관 추진실적보고(월보)양식 1부.  끝.