투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰 (G밸리 근로자문화복지센터 건립공사)

1. 설비부-1927(2021.02.09.)호 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진 중인 「G밸리 근로자문화복지센터 건립공사」에 소요되는 관급자재(비상발전기 외 3건)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 세부내역

연번	계약번호	품 명	계약자	계약금액	납품기한
					당초	변경
1	***********	***** *******************	*********	********** *********	***********	***********
2	***********	************	******	*********** *********	***********	***********
3	***********	*************	*********	********** *********	***********	***********
4	***********	****** *****************	********	********** *********	***********	***********

나. 연기사유 : 현장여건 변화[공사 준공기한 연기에 따른 납품(설치)시기 미도래]

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 납품기한 연기 검토보고서 1부.

2. 합의각서 각1부.

3. 세부계약내역(분할납품요구 및 통지)각1부.  끝.

	설비부장
★주무관	박희준		건축설비과장	김은덕		설비부장	02/10 김중영
협조자
시행	설비부-1933	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	gogold79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)