(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사(조경)

공사개요

· 위    치 : 중랑천 한강합류부~군자교

· 규    모 : 연장 4.9km(양안 9.8km)

· 공사기간 : ‘19.05.27.~’22.08.09

· 도 급 비 : ********

· 시 공 사 : 에스트건설

· 감 리 단 : ㈜천일 외 2개사

· 설 계 사 : 동부엔지니어링

실정보고 건명

송정지구 식재면고르기 추가 및 초화류 수종 변경

(****************************

실정보고 사유

1. 식재면 고르기 추가

- 유지관리기관의 식재부지내 종자파종을 위한 면고르기 요청 및 초화류 식재작업을 위한 면정리 필요

2. 초화류 수종 변경

- 기설계된 관급자재(사초) 수급이 어려워 납품가능한 수종으로 변경

건설사업관리단

검토의견

*********************************************************************************************************************

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

- 변경사항

구 분				수 량		금 액(천원)		비 고 (사업비 증감)
				당 초	변 경	당 초	변 경
***	*** ***		*	*	******	*	******	********
	**	8㎝	*	******	*	*****	*
	***	8㎝	*	******	******	*****	*****
** **	**		*	******	*	*****	*	********
	***		*	******	******	*****	******

- 사업비 검토

구 분		당 초	변 경	증 △감	비 고
* * *	*****	******	******	******
	*****	*****	******	*****
	***	******	******	******
*****		******	******	************
***		******	******	******

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

- 송정지구 내 초화류 식재 및 종자파종 구간의 식재면 상태와 토질이 불량하여 정비가 불가피한 사항이며, 수급이 곤란한 관급자재(사초)를 용이한 수종으로 대체 식재코자한 사항으로 승인함이 타당함에 따라 실정보고 승인처리하고 추후 설계변경 반영코자 함.

비 고

붙임 : 감리단 실정보고 검토 보고서 1부.

결재

주무관

김현곤

공원시설과장

이병호

방재시설부장

전결 02/22

박홍봉

협조

주무관

김규희