투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 계약변경 의뢰(계측제어설비 제작구매-관악산 저류조)

우리 본부에서 시행중인 「관악산 저류조 통신공사」 관급자재(계측제어설비 제작구매)에 대하여 아래과 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 계측제어설비 제작구매(관악산 저류조)

나. 계약업체 : (주)싸이몬

다. 납품기한 : 2015. 5. 30

라. 변경내역(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
계약금액	335,000,000	342,232,000	증 7,232,000

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 관악산 저류조 설치, 시설비

붙임 : 1. 설계변경(1회)보고서 및 합의각서 각 1부.

2. 관급자재 변경도서(계측제어) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이재홍		녹색성장과장	김창균		설비부장	08/06 代권오식
협조자	경리과장	代서건석
시행	설비부-8699	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8638	/전송	02-3708-8659	/	hong2495@seoul.go.kr	/	대시민공개