11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리부서에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명 (투자심사 당시 사업명)	총사업비 (투자심사 당시 사업비)	2012년까지 집행사업비 (집행액)	2013년 소요사업비 (‘13년도 예산서기준)	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%) (‘13년도 말 기준 집행액 x 100/총사업비)
경의선숲길 공원조성공사	45,720	10,994	3,000	31,726	2016	2009	15.1
경춘선폐선부지 공원조성공사	129,485	5,800	4,350	33,850	2016	2009	3.5
장기미집행 도시계획시설(공원) 매수청구보상	4,935	0	4,935	0	2013	2012	98.4
봉화산근린공원(중랑)조성	75,000	50,416	8,999	15,585	2020	1999	77.0
성산근린공원(마포)조성	36,178	26,222	5,229	4,727	2019	2009	80.3
타슈켄트서울공원조성	3,006	1,776	1,195	-	2014	2010	77.6
동네뒷산(북한산도시자연공원 미아동 산108-3일대)	6,570	2,642	1,366	2,562	2014	2012	46.8
마포석유비축기지재활용사업	27,500	0	2,000	25,500	2016	2012	0
오동근린공원(강북)조성	49,854	26,009	3,400	20,445	2018	2013	52.2
동네뒷산공원조성(용마도시자연공원 면목고 뒤)	6,372	0	2,893	3,479	2016	2013	44.3
오동근린공원(성북) 조성	9,138	2,138	1,500	296	2014	2012	56
봉산도시자연공원(증산지구) 조성	4,948	1,100	2,000	0	2014	2011	50
백련근린공원(은평) 조성	23,420	15,628	458	13,744	2018	2010	69
도봉구 초안산근근린 공원 조성	145,390	120,999	3,162	21,304	2020	2009 (재심사)	85
백련근린공원 (서대문) 조성	35,189	24,244	1,859	9,097	2020	2012 (재심사)	74
관악산도시자연공원(독산지구) 조성	49,899	36,100	456	13,343	2016	2011	73.3
현충근린공원(동작) 조성	85,200	37,844	2,740	44,616	2020	2011	47.6
상도근린공원(관악) 조성	24,431	11,919	3,632	8,880	2020	2009	63.7
관악산도시자연공원(문성지구) 조성	13,000	3,350	3,330	6,320	2015	2010	51.4
관악산도시자연공원(낙성대지구) 조성	14,012	9,289	2,500	2,223	2015	2011	84.1
관악산도시자연공원(청룡산지구) 조성	16,019	10,470	2,625	0	2013	2013	100
수명산근린공원 조성사업	33,500	-	200	-	-	2012	0
봉제산근린공원 조성사업	45,477	38,731	2,742	4,004	2020	2008	91.2
꿩고개근린공원 조성사업	30,868	15,537	881	269	2020	2008	53.2
개화근린공원 조성사업	31,040	-	1,211	29,829	2020	2012	3.9
암사역사생태공원(강동)	49,870	1,600	4,640	43,630	2018	2011	13
장지근린공원(송파)	3,101	1,000	1,000	3,202	2014	2013	32
천마근린공원(송파)	22,555	17,168	1,007	31,372	2016	2018	80
서리풀근린공원(서초)	91,480	77,440	732	13,328	2018	2009	85
유아숲체험장 조성	10,500	2,125	4,416	3,959	2016	2012	62
시유공원내 테마놀이터 조성	10,824	1,261	3,164	2,206	2014년	2011년	40.9
남산공원 회현지구 재정비사업	48,890	23,908	744	24,238	2016	2008	50.1
갈현도시농업 체험․학습공원 조성	13,100	11,104	1,440	1,441	2015	2012	95.7

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

경의선숲길 공원조성사업

담당자

공원조성과 최송천(☎2133-2065)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경의선 지하화에 따른 철도 지상부를 활용한 역사와 문화를 담은 경의선숲길을 조성하여 시민의 삶의 질 향상과 쾌적한 환경 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 11. ∼ 2016. 3.

○ 위    치 : 경의선 지상부(용산문화체육센터∼가좌역)

○ 규    모 : 102,008㎡(6.3㎞)

○ 사업내용 : 경의선 지상부 공원조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,720백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	45,720	10,994	3,000	12,402	19,324
시 도 비	45,720	10,994	3,000	12,402	19,324

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15.1%)

○ 1단계 공사 완료

- 위치 및 규모 : 마포구 대흥동 일대 17,400㎡(760m)

- 공 사 비 : 4,921백만원

- 공사기간 : 2010. 12 ~ 2012. 2

○ 2단계 공사 추진중

- 위치 및 규모 : 용산구문화체육센터 ~ 가좌역 84,268㎡(3.48㎞)

- 총공사비 : 17,705백만원

- 공사기간 : 2013. 9. 30 ~ 2016. 3. 31

□ 향후계획

○ 2014. 12  연남동, 새창고개, 염리동 구간 공사 완료

○ 2016.  3  잔여구간 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 당초 2009. ~ 2012. ⇒ 변경 2009. ~ 2016.

○ 변경사유

- 1단계 공사 시행결과 산책로와 자전거길이 접하여 녹지공간 협소하고

- 주민설명회 등의 의견을 반영 보완설계 등에 따라 사업기간 변경

사업명

경춘선폐선부지 공원조성사업

담당자

공원조성과 이용남(☎2133-2061)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐선부지를 활용하여 지역주민 장기 숙원사업인 공원을 조성, 주민 삶에 질 향상과 도시지역과 하천, 산림을 연결하는 광역 그린웨이 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 6. ∼ 2015. 12.

○ 위    치 : 경춘선 폐선부지(광운대역∼서울시계)

○ 규    모 : 211,392㎡(6.3㎞)

○ 사업내용 : 경춘선 폐선부지 활용 공원조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 44,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	44,000	5,800	4,350	7,657	26,193
시 도 비	44,000	5,800	4,350	7,657	26,193

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7.2%)

○ 1단계 공사 추진중

- 위치 및 규모 : 공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리 48,170㎡(1,900m)

- 공 사 비 : 9,214백만원

- 공사기간 : 2013. 10. 10 ~ 2015.1.9.

○ 2단계 공사 보완설계 발주중

- 위치 및 규모 : 경춘철교 ~ 산업대3길고가철교 53,860㎡(1,068m)

- 용 역 비 : 294백만원

- 용역기간 : 착수일로부터 240일

□ 향후계획

○ 2014. 11  경춘철교 정비공사 발주

○ 2015.  5  2단계 공사 발주

□ 사업변경 내역

○ 총사업비(129,485백만원 ⇒ 44,000백만원) 및 완료기간(2012년 ⇒ 2016년)

○ 변경사유

- 한국철도시설공단과 국유지 무상사용 업무협약에 따라 보상비 감소

- 행복주택지 포함 등으로 건축물 및 대형구조물 제외에 따른 보완설계 필요

사업명

장기미집행 도시계획시설(공원)

매수청구보상

담당자

공원조성과 이상용(☎2133-2056)

□ 사업목적 및 필요성

○ 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제47조에 따라 도시계획시설(공원) 결정

고시일로부터 10년 이내에 사업이 시행되지 아니한 부지 중 지목이 대(垈)인       토지소유자의 매수청구에 따라 청구가 있는 날부터 6개월 이내에 매수여부를       결정하여 소유자에게 통지하여야 하며, 매수결정을 통지한 날부터 2년 이내에       매수하도록 규정하고 있음.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1 ～ 2013. 12

○ 위 치 : 종로구 신교동 2-11 등14필지

○ 규 모 : 8,073㎡ (2011. 7 ～ 2012. 6 매수청구 접수․ 결정 분)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,935백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	353,397	107,914	4,856	7,672	232,955
국 비
시 도 비	353,397	107,914	4,856	7,672	232,955
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98.4%)

○ 총 14필지중 매도포기한 1필지를 제외하고 13필지에 대하여 보상 완료

□ 향후계획

○ 감정평가 결과 예산부족분(4건 7필지)에 대하여는 2014년도 예산편성하여

지급

사업명

봉화산근린공원(중랑)조성

담당자

공원조성과 김태순(☎2133-2067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 공원용지를 보상하여 훼손된 녹지를 생태적으로 복원하고,

시민이 쉽고 편안하게 이용할 수 있는 공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 1999 ~ 2020

○ 위 치 : 중랑구 묵동 산46-1 일대

○ 규 모 : 977,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 75,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계		50,416	8,999	2,090	13,495
국 비
시 도 비	75,000	50,416	8,999	2,090	13,495
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 77%)

○ 사유지 253,504㎡ 보상완료

○ 중랑구청뒤, 극동아파트 뒤 등 휴게공간 및 어린이놀이터 등 조성

□ 향후계획

○ 2020년까지 지속적으로 예산범위내에서 훼손된 녹지 및 시설설치예정지

등 공원에 꼭 필요한 사유지 보상

○ 훼손된 녹지복원 및 공원조성계획에 따라 공원조성

□ 사업변경 내역

○ 토지가격의 지속적인 상승으로 예정된 사유지 보상에 필요한 재원이 절대적으로 부족하여 향후 투자 재심사 필요

사업명

성산근린공원(마포)조성

담당자

공원조성과 김태순(☎2133-2067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사유지 보상 후 훼손된 생태계를 복원하고 공원으로 조성하여 주민들에게 다양한 체험 및 휴식공간으로 제공하고 성미산마을 공동체와 연계하여 주민이 편안히 이용할 수 있는 공원으로 가꾸어 나가고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ~ 2017

○ 위 치 : 성산동 산11-59 일대

○ 규 모 : 103,961.7㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,178백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계		26,129	5,232	1,000	3,817
국 비
시 도 비	36,178	26,129	5,232	1,000	3,817
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

○ 사유지 44,393㎡ 보상완료

○ 골프연습장 및 배드민턴장 철거후 다목적커뮤니티센터 및 다목적 운동장  등 조성

□ 향후계획

○ 2017년까지 지속적으로 예산범위내에서 훼손된 녹지 및 시설설치예정지

등 공원에 꼭 필요한 사유지 보상

○ 훼손된 녹지복원 및 공원조성계획에 따라 공원조성

□ 사업변경 내역

○ 토지가격의 지속적인 상승으로 예정된 사유지 보상에 필요한 재원이 절대적으로 부족하여 투자 재심사 진행중(49,817백만원)

사업명

타슈켄트 서울공원 조성

담당자

공원조성과 김태순(☎2133-2067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2009년 5월 이명박 대통령 우즈베키스탄 방문시 고려인문화협회장의 한국공원 조성 요청에 따라 서울시와 타슈켄트시가 2010년 7월 자매도시 협정을 체결하고, 교류사업으로 타슈켄트시  『서울공원』 조성사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2014

○ 위 치 : 우즈베키스탄 타슈켄트시 바부르공원내

○ 규 모 : 8,067㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,006백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계		1,776	1,195	0	0
국 비
시 도 비	3,006	1,776	1,195	0	0
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 77.6%, 2014년 99%)

○ 공원 8,067㎡ 조성완료

○ 누각, 연못, 담장, 계단식화단, 정자, 해치상 등 설치 및 소나무 등 교목 249주, 무궁화 등 관목 1,344주, 초화 5,150본 식재

□ 향후계획

○ 2014년 사업완료

사업명

동네뒷산공원조성(북한산도시자연공원 미아동 산108-3일대)

담당자

공원조성과 김태순(☎2133-2067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 공원용지에 대하여 연차적으로 보상을 실시함으로써 장기 민원을 해소하고 쾌적하고 아름다운 공원을 조성하여 시민에 제공

○ 기 간 : 2011 ~ 2014

○ 위 치 : 강북구 미아동 산108-3 일대

○ 규 모 : 9,154㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,570백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계		2,642	2,000	1,037	891
국 비
시 도 비	6,570	2,642	2,000	1,037	891(집행불필요)
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 46.8%)

○ 2014년까지 사유지 9,154㎡ 보상 및 7,955㎡공원조성

○ 공원용지(사유지) 보상, 산책로, 쉼터, 숲속놀이터, 체력단련장 조성 등

□ 향후계획

○ 2014년까지 사유지 보상 완료

○ 훼손된 녹지복원 및 공원조성계획에 따라 공원조성

사업명

마포석유비축기지 재활용사업

담당자

공원조성과 김태순(☎2133-2067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마포 석유비축기지 일대(장기미집행 도시계획시설 – 녹지)의 석유탱크 등 산업유산과 주변의 녹지를   활용하여 친환경 복합문화공간으로 조성하고 시민에게 높은 콘텐츠를 제공하여 시민 만족도를 향상 시키고자 함

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 미포구 성산동 산53-1 일대

○ 규 모 : 30,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계		0	0	535	26,965
국 비
시 도 비	27,500	0	0	535	26,965
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2014년 4월까지 기본계획 완료

○ 2016년까지 전시관, 공연장 건립, 주변 외부공간 조성, 진입로 정비 등

□ 향후계획

○ 2014년까지 국제현상설계공모

○ 2015년 설계 및 공사착공, 2016년 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업비 27,500백만원에서 41,253백만원으로 증액 투자재심사(2014년)

사업명

오동근린공원(강북)조성

담당자

공원조성과 김태순(☎2133-2067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근린공원내 장기 미집행 공원용지에 대한 토지보상을 실시하여 장기민원을 해소하고 주민들의 요구에 부응하는 생태환경으로 복원하여 도시민의 건전한 생활환경 확보와 시민고객 삶의 질 향상

○ 기 간 : 2004 ~ 2020

○ 위 치 : 강북구 번동 산17 일대

○ 규 모 : 1,349,556.4㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,854백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계		26,009	3,400	5,949	14,496
국 비
시 도 비	49,854	26,009	3,400	5,949	14,496
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52.2%)

○ 사유지 61,342㎡ 보상완료

○ 2014년 어린이놀이터 등 조성예정

□ 향후계획

○ 2020년 까지 사유지 계속보상

○ 어린이놀이터, 휴게시설, 운동시설 등 설치

□ 사업변경 내역

○ 사업비 27,571백만원에서 49,854백만원으로 증액 투자재심사(2013년)

사업명

동네뒷산공원조성(용마도시자연공원 면목고 뒤)

담당자

공원조성과 김태순(☎2133-2067)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무단 경작과 무허가 건축물 등으로 훼손되어 있는 면목고 뒤 용마산 도시자연공원 일부에 대하여 공원용지를 보상하고 휴게 등의 여가공간과 녹지를 조성

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 중랑구 산29-1 일대

○ 규 모 : 15,646㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,372백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계		0	2,893	1,226	2,253
국 비
시 도 비	6,372	0	2,893	1,226	2,253
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44.3%)

○ 사유지 7,815㎡ 보상완료

○ 2014년 토지보상 및 건물보상

□ 향후계획

○ 2016년 까지 사유지 보상 및 공원조성

○ 휴게시설, 운동시설 등 설치

사업명

오동근린공원(성북) 조성

담당자

공원조성과 가덕윤(☎2133-2071)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오동공원내 노후된 시설물, 미정비산책로, 휴식공간 등을 정비 조성하고 공원미관을 저해하는 배드민턴장을 한곳으로 통합하여 공원을 찾는 시민들에게 쾌적한 공원환경을 제공하고 여가 및 체육공간으로 활용코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 1. ~ 2014. 12.

○ 위 치 : 서울시 성북구 월곡동 산2-1번지 일대

○ 규 모 : 노후공원재조성 82,000㎡, 실내배드민턴장 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,138백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,434	3,638	1,500	296	0
국 비	5,434	3,638	1,500	296	0
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

○ 노후공원재조성 62,000㎡

○ 실내배드민턴장 착공(공정율 30%)

□ 향후계획

○ 산림훼손지(부적합 배드민턴장 정비) 및 노후공원재조성(10,000㎡)

사업명

봉산도시자연공원(증산지구) 조성

담당자

공원조성과 가덕윤(☎2133-2071)

□ 사업목적 및 필요성

○	장기미집행 도시계획시설(공원)인 봉산도시자연공원(증산지구)의 토지보상 및 공원조성 사업을 추진하여, 장기민원을 해소하고 이용 주민들에게는 쾌적하고 편안한 휴식공간으로 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

○ 위 치 : 서울시 은평구 증산동 산18번지 일대

○ 규 모 : 장기미집행 공원용지 보상17,090㎡ 및 공원조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,948백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,100	1,100	2,000	0	0
국 비	3,100	1,100	2,000	0	0
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 장기미집행 공원용지 보상 3,544㎡ 및 조성공사 9,044㎡

□ 향후계획

○ 사업준공

사업명

백련근린공원(은평) 조성

담당자

공원조성과 가덕윤(☎2133-2071)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획시설(공원) 부지내 사유토지의 보상문제는 재산권 행사 제한의 장기화에 따른 반복 민원의 요인이 되고 있어 사유토지 보상과 함께 공원 주변 경관이 조화가 되도록 공원을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2004. 1. ~ 2014. 12. 이후

○ 위 치 : 서울시 은평구 응암동 산7-5번지 일대

○ 규 모 : 장기미집행 공원용지보상 78,100㎡ 및 공원조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,420백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	23,420	15,628	458	1,093	6,241
국 비	23,420	15,628	458	1,093	6,241
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

○ 장기미집행 공원용지 보상 및 공원조성(46,143㎡)

□ 향후계획

○ 미집행 공원용지 보상 및 조성(31,957㎡)

사업명

도봉구 초안산근린공원 조성사업

담당자

공원조성과 심현보(☎2133-2068)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 공원용지 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식

공간 조성과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 1996 ~ 2020

○ 위 치 : 도봉구 창동 일대

○ 규 모 : 토지보상 및 공원조성 509,053㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 145,390백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	145,390	120,999	3,087	1,521	19,783
국 비
시 도 비	145,390	120,999	3,087	1,521	19,783
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 85%)

○ 현재 보상 추진중 (일부 보상완료 지역은 공원조성 완료)

○ 시 재정 여건이 어려워 사업비 확보에 어려움이 있음.

□ 향후계획

○ 정상 사업 추진을 위해 지속적으로 노력

사업명

백련근린공원(서대문) 조성

담당자

공원조성과 심현보(☎2133-2068)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 공원용지 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식

공간 조성과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 1999 ~ 2020

○ 위 치 : 서대문구 홍은동 산19-1일대

○ 규 모 : 토지보상 및 공원조성 269,109㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,189백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	35,189	24,244	1,808	666	8,471
국 비
시 도 비	35,189	24,244	1,808	666	8,471
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 74%)

○ 현재 보상 추진중 (일부 보상완료 지역은 공원조성 완료)

○ 시 재정 여건이 어려워 사업비 확보에 어려움이 있음.

□ 향후계획

○ 정상 사업 추진을 위해 지속적으로 노력

사업명

관악산도시자연공원(독산지구) 조성

담당자

공원조성과 박철수(☎2133-2075)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지) 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식 공간제공과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 1997 ～ 2016

○ 위 치 : 금천구 독산동 산89-7 일대

○ 규 모 : 227,188㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,899백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	49,899	36,100	456	0	13,343
국 비
시 도 비	49,899	36,100	456	0	13,343
시군구비
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73.25%)

○ 현재 보상 추진 중

○ 우리시의 재정여건으로 인해 예산확보에 어려움이 있음

□ 향후계획

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지)에 대한 실효에 대비하여 예산확보를 위해 지속적인 노력 예정임.

□ 사업변경 내역

(단위: 백만원)

구 분	당 초	현 재	비고
사업기간	1997 ~ 2001	1997 ~ 2016
규 모(㎡)	355,987	227,188
총사업비	35,798	49,899	증 14,101

※ 연차별 장기미집행 공원용지 보상 사업의 장기화로 당초 심사금액 대비 사업비가 50% 이상 증가

사업명

현충근린공원(동작) 조성

담당자

공원조성과 박철수(☎2133-2075)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지) 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식 공간제공과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 1997 ～ 2020

○ 위 치 : 동작구 동작동 산18-6 일대

○ 규 모 : 284,193㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 85,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	85,200	37,844	2,740	1,400	43,316
국 비
시 도 비	85,200	37,844	2,740	1,400	43,316
시군구비
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47.63%)

○ 현재 보상 추진 중

○ 우리시의 재정여건으로 인해 예산확보에 어려움이 있음

□ 향후계획

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지)에 대한 실효에 대비하여 예산확보를 위해 지속적인 노력 예정임.

□ 사업변경 내역

(단위: 백만원)

구 분	당 초	현 재	비고
사업기간	1997 ~ 2010	1997 ~ 2020
규 모(㎡)	19,943	284,193
총사업비	95,900	85,200

※ 인위적인 시설을 최소화하는 방안으로 공원조성

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

상도근린공원(관악) 조성

담당자

공원조성과 박철수(☎2133-2075)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지) 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식 공간제공과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ～ 2013

○ 위 치 : 관악구 봉천동 산103-3 일대

○ 규 모 : 101,478㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,431백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	24,431	11,919	3,632	1,010	7,870
국 비
시 도 비	24,431	11,919	3,632	1,010	7,870
시군구비
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63.65%)

○ 현재 보상 추진 중

○ 우리시의 재정여건으로 인해 예산확보에 어려움이 있음

□ 향후계획

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지)에 대한 실효에 대비하여 예산확보를 위해 지속적인 노력 예정임.

□ 사업변경 내역

(단위: 백만원)

구 분	당 초	현 재	비고
사업기간	2010 ~ 2013
규 모(㎡)	101,478	변경 없음
총사업비	24,431

사업명

관악산도시자연공원(문성지구) 조성

담당자

공원조성과 박철수(☎2133-2075)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지) 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식 공간제공과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ～ 2013

○ 위 치 : 관악구 미성동 산197-3 일대

○ 규 모 : 13,230㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	13,000	3,350	3,330	1,500	4,820
국 비
시 도 비	13,000	3,350	3,330	1,500	4,820
시군구비
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51.38%)

○ 현재 보상 및 조성사업 추진 중

○ 우리시의 재정여건으로 인해 예산확보에 어려움이 있음

□ 향후계획

○ 2015. 완료예정

□ 사업변경 내역

(단위: 백만원)

구 분	당 초	현 재	비고
사업기간	2011 ~ 2013
규 모(㎡)	13,230	변경 없음
총사업비	13,000

사업명

관악산도시자연공원(낙성대지구) 조성

담당자

공원조성과 박철수(☎2133-2075)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지) 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식 공간제공과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008 ～ 2013

○ 위 치 : 관악구 낙성대동 274-2 등 31필지

○ 규 모 : 18,601㎡(보상9,280㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	14,012	9,289	2,500	804	1,419
국 비
시 도 비	14,012	9,289	2,500	804	1,419
시군구비
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84.14%)

○ 현재 보상 및 조성사업 추진 중

○ 우리시의 재정여건으로 인해 예산확보에 어려움이 있음

□ 향후계획

○ 2015. 완료예정

□ 사업변경 내역

(단위: 백만원)

구 분	당 초	현 재	비고
사업기간	2008 ~ 2012	2008 ~ 2013
규 모(㎡)	18,601	18,601
총사업비	9,812	14,012

사업명

관악산도시자연공원(청룡산지구) 조성

담당자

공원조성과 박철수(☎2133-2075)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설(공원용지) 중 시민의 이용수요가 높은 지역을 대상으로 휴식 공간제공과 녹지량 확충을 통해 쾌적한 생활환경에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ～ 2013

○ 위 치 : 관악구 봉천동 산175-6 등 25필지

○ 규 모 : 51,954㎡(보상51,675㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,019백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	13,095	10,470	2,625	0	0
국 비
시 도 비	13,095	10,470	2,625	0	0
시군구비
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013년 보상 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

(단위: 백만원)

구 분	당 초	현 재	비고
사업기간	2009 ~ 2013	2008 ~ 2013
규 모(㎡)	46,124㎡(보상:45,880㎡)	51,954㎡(보상51,675㎡)
총사업비	10,516	16,019

※ 보상 대상 면적 보상완료

사업명

수명산근린공원 조성사업

담당자

공원조성과 이준근(☎2133-2076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공원 추가 조성(41,462㎡)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 강서구 내발산동 산59-2일대

○ 규 모 : 당초 83,807.1㎡ → 변경 125,270㎡(증41,462.9㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	33,500	-	-	-	-
국 비
시 도 비	33,500	-	-	-	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 도시계획시설(공원) 미결정

사업명

봉제산근린공원 조성사업

담당자

공원조성과 이준근(☎2133-2076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강서구 화곡동 산1번지 일대 장기 미집행 도시계획시설 보상 및 공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2004 ~ 2013

○ 위 치 : 강서구 화곡동 산1번지 일대

○ 규 모 : 71,360㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,477백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	45,477	38,731	2,742	2,000	2,004
국 비
시 도 비	45,477	38,731	2,742	2,000	2,004
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 91.2%)

○ 토지보상 53,300㎡완료

○ 공원조성 35,607㎡완료

□ 향후계획

○ 토지보상 및 공원조성

사업명

꿩고개근린공원 조성사업

담당자

공원조성과 이준근(☎2133-2076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강서구 방화동 132-80번지 일대(180,000㎡, 보상 160,584㎡) 장기 미집행 도시계획시설을 보상하고 공원으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2001 ~ 2012

○ 위 치 : 강서구 방화동 132-80일대

○ 규 모 : 180,000㎡(보상 160,584㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,868백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	30,868	15,537	881	269	14,181
국 비
시 도 비	30,868	15,537	881	269	14,181
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53.2%)

○ 토지보상 53,530㎡완료

○ 공원조성 29,050㎡완료

□ 향후계획

○ 토지보상 및 공원조성

사업명

개화근린공원 조성사업

담당자

공원조성과 이준근(☎2133-2076)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강서구 개화동 산42-1일대 개화근린공원의 장기미집행 공원용지 보상 및 공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2003 ~ 2020

○ 위 치 : 강서구 개화동 산42-1일대

○ 규 모 : 386,500㎡(보상 209,206㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,040백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	31,040	-	1,211	1,000	28,829
국 비
시 도 비	31,040	-	1,211	1,000	28,829
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 토지보상 3,150㎡완료

○ 공원조성 23,000㎡완료

□ 향후계획

○ 토지보상 및 공원조성

사업명

암사역사생태공원(강동)

담당자

공원조성과 정소영

(☎2133-2074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사적 상징성을 지니는 동남권역의 요지로서 도시생태숲 보존 및 가족캠핑장, 역사문화 체험장 건립을 통해 지역주민의 문화욕구 증가에 대비하고 지역문화 활성화를 위한 동부권역의 대규모 테마파크로 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2018

○ 위 치 : 강동구 암사동 211-1일대

○ 규 모 : 110,133㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  49,870백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	49,870	3,600	4,640	4,000	37,630
국 비	12,000	-	2,000	2,000	8,000
시 도 비	37,870	3,600	2,640	2,000	29,630
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

○ 토지보상 보상완료(4,215㎡)

○ ‘14 예산 4,000백만원 확보

□ 향후계획

○ 지속적인 국비 요청

○ 단계별 토지보상 후 일부 공원조성

사업명

장지근린공원(송파)

담당자

공원조성과 정소영

(☎2133-2074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장지근린공원 도시계획 결정지에 대한 보상 및 공원 조성으로 토지주의 장기 민원 해소 및 지역주민 정서함양에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2014

○ 위 치 : 송파구 가락동 산77번지 일대

○ 규 모 : 9,643㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  49,870백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,101		1,000	2,101
국 비
시 도 비	3,101		1,000	2,101
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ 토지보상 진행 중

○ ‘14 예산 2,101백만원 확보

□ 향후계획

○ 장기미집행 민원제기 대상지 토지보상 시행

사업명

천마근린공원(송파)

담당자

공원조성과 정소영

(☎2133-2074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 공원에 대한 토지보상 및 공원조성으로 토지주의 장기민원 해소 및 지역주민 정서함양에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2016

○ 위 치 : 송파구 마천동 산1-1번지 일대

○ 규 모 : 185,295㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  22,555백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	22,555	17,168	1,007	1,511	1,861
국 비
시 도 비	22,555	17,168	1,007	1,511	1,861
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 토지보상 진행 중

○ ‘14 예산 1,511백만원 확보

□ 향후계획

○ 장기미집행 민원제기 대상지 토지보상 시행

사업명

서리풀근린공원(서초)

담당자

공원조성과 정소영

(☎2133-2074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설 공원에 대하여 도시계획시설 실효 대비 토지보상 및 공원조성으로 토지주의 장기민원 해소 및 지역주민의 정서함양에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012~2018

○ 위 치 : 서초구 서초동 산160-18번지 일대

○ 규 모 : 170,473㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  91,480백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	91,480	77,440	732	2,047	11,281
국 비
시 도 비	91,480	77,440	732	2,047	11,281
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 토지보상 진행 중

○ ‘14 예산 2,047백만원 확보

□ 향후계획

○ 장기미집행 민원제기 대상지 토지보상 시행

사업명

유아숲체험장 조성

담당자

공원조성과 김대호(☎2133-2079)

□ 사업목적 및 필요성

○ 숲에서 이루어지는 자연체험과 교육이 아동들의 정신적, 신체적 발달에       효과적이라는 사회인식이 확산되면서 상시 자연을 체험하며 교육이 가능       한 공간의 필요성이 대두됨에 따라,

○ 숲이 잘 보전된 산림형의 공원내 도시 유아들이 마음껏 자연을 체험하며

교육효과를 도모할 수 있는 유아숲체험장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2016

○ 위 치 : 관악구 관악산공원 등 25개소

○ 규 모 : 25개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,500	2,125	4,416	1,492	2,467
국 비
시 도 비	10,500	2,125	4,416	1,492	2,467
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

○ 2011~2012년 유아숲체험장 시범조성 3개소

○ 2013년 유아숲체험장 9개소 조성

□ 향후계획

○ 2014년 유아숲체험장 6개소 조성(예정)

○ 2015년 유아숲체험장 7개소 조성(예정)

사업명

시유공원내 테마놀이터 조성

담당자

공원조성과 임유미(☎2133-2081)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시유공원내 노후 어린이놀이터를 「어린이놀이시설 안전관리법」에 충족하고, 테마가 있는 놀이터로 재조성하여 공원이용 활성화 및 만족도를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. ~ 2014. 12.

○ 위 치 : 보라매공원 어린이놀이터 등 48개소

○ 규 모 : 44,124㎡(48개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : (당초)10,824백만원 → (현재)6,631백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,631	1,261	3,164	2,206	0
시 비	당초 10,824	1,261	3,164	2,206	0
	현재 6,631

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

○ 2012. 1. ~ 2013. 4 : 보라매, 월드컵공원 내 어린이놀이터 재조성

○ 2013. 1. ~ 2014. 4 : 서울숲 숲속놀이터 등 13개소 재조성

○ 2014. 1. ~ 2014. 7 : 인왕산공원 쌈지놀이터 등 6개소 재조성 추진중

□ 향후계획

○ 2014. 11. : 2014 시유공원내 테마놀이터 6개소 재조성

○ 2014. 12. : 시유공원내 테마놀이터 재조성 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경내역 : (당초)10,824백만원 → (현재)6,631백만원

○ 총사업비 변경사유 : 사업대상지 48개소 중 27개소는 자치구에서 자체정비하여 사업대상지가 21개소로 축소됨

사업명

남산공원 회현지구 재정비사업

담당자

공원조성과 조규양(☎2133-2084)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사와 자연, 문화가 어우러지는 남산공원 재정비를 통해 이용시민에게 감동을 주는 서울의 대표공원으로 자리매김하고, 아울러 관광객 1,200백만명 유치에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2016

○ 위 치 : 남산공원 회현지구 일대

○ 규 모 : 171,900㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 48,890백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	48,890	23,908	744	3,367	20,871
국 비
시 도 비	48,890	23,908	744	3,367	20,871
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50.1%)

○ ‘09. 3 ~ 9 : 1단계 발굴조사

○ ‘09.12 ~’10. 7 : 1단계 공사

○ ‘09.10 ~’10. 7 : 2단계 발굴조사

○ ‘11. 1 ~’12. 5 : 2단계 공사

○ ‘13. 3.15 : 3단계 발굴조사 및 설계용역 추진계획 방침

○ ‘13. 6 ~ : 3단계 발굴조사

○ ‘14. 1 ~ : 3단계 설계 시행

□ 향후계획

○ ‘15. ~ ’16. : 3단계 공사시행

사업명

갈현도시농업 체험․학습공원 조성

담당자

공원조성과 박종헌(☎2133-2086)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남산 석호정 이전 대체 부지인 갈현근린공원 확대부지를 노인층 및 소외       계층 등 단체가 참여, 치유와 교육을 겸한(힐링가든+에듀팜) 도시농업체       험원을 조성하여 도시민의 여가생활에 기여

○ 시장 공약사업 : 도시농업과 커뮤니티가든 활성화(4-3-4)

○ 시장 지시사항 (갈현도시농업공원 종합적 추진, 2012.03.08)

□ 사업개요

○ 기 간 :  '09. 10. ~ '15. 6.

○ 위 치 :  은평구 불광동 458-1 일대

○ 규 모 :  24,615㎡(1단계 15,694㎡, 2단계8,921㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,985백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	13,985	11,104	2	2,578	301
국 비
시 도 비	13,985	11,104	2	2,578	301
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 1단계 부지 : '09.04 ~ '11.12, 국궁장 추진(28필지, 15,694㎡, 5,800백만원)

○ 2단계 부지 : 12필지 7,230㎡중 불광동 457번지 등 9필지(5,304백만원) 보      상완료

○ 2단계 부지 : 불광동 458-2번지외 2필지 ‘14.8.12 보상완료예정

○ 부지조성

- ‘13. 11 ~ ’14.11(기반조성, 포장공사, 관리사무실 등)

- ‘15.  1 ~ ’15. 6(관목, 식생매트, 원두막 등)

□ 향후계획

○ ‘14. 11 (기반조성,포장공사,관리사무실등) 준공

○ ‘15.  1 (관목,식생매트,원두막 등) 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초 24,516㎡ → 변경 24, 615㎡

○ 총사업비 : 당초 13,100백만원 → 변경 13,985㎡(보상비 증가)

○ 사업기간 : 당초 2009. 10 ~ 2013. 12 → 변경 2009. 10 ~ 2015. 6