문서번호	설비부-2646
결재일자	2021. 2. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
임재욱		김오열	02/26 김중영
협조

서남물재생센터 총인처리시설 설치사업 건설사업관리용역

설계변경(총차3회,4차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 03.

도시기반시설본부

설     비     부

서남물재생센터 총인처리시설 설치사업 건설사업관리용역

설계변경(총차3회,4차1회) 검토 보고

『서남물재생센터 총인처리시설 설치사업』추진에 따른 건설사업관리용역의 건설사업관리기술자(건축,안전,통신)에 대한 배치 조정내역을 반영하여 계약내역 및 계약금액을 변경하고자 보고 드림

********

*****************************************

*****************************************

Ⅰ		용역개요

□ 건    명 : 서남물재생센터 총인처리시설 설치 건설사업관리용역

□ 위    치 : 서울시 강서구 양천로 201(서남물재생센터)

□ 규    모 : 총인처리시설 737천㎥/일

□ 용역기간 : ********************************************

□ 용 역 비 : ****************************

□ 용 역 사 : ㈜동해종합기술공사 외 3개사

Ⅱ		관련근거

□ 『서남물재생센터 총인처리시설 설치사업』전문 안전감리 배치연장 승인

: 설비부-10283호(‘20.7.15.),설비부-12457(‘20.8.24.)

□  건설사업관리기술자(통신분야) 배치 조정 검토(서남총인)

: 도기본-20-10318호(‘20.9.16.)

□  건설사업관리 설계변경 설계서(총차 3회,4차1회) 제출(서남총인)

: 감리부-21-00142호(‘21. 2. 22.)

Ⅲ		검토내용

□ 설계변경 사유

○『서남물재생센터 총인처리시설 설치사업』의 건설사업관리용역 시행 중 통신분야 건설사업관리 대상 누락에 따른 과업변경으로 인한 감리 배치, 건설사업관리단 운영계획 변경으로 인한 건축 및 조경분야 감리 투입일 조정, 전문 안전감리 배치기간 연장 등 감리 배치 조정내역을 최종 반영하여 계약금액을 변경하고자 함

□ 설계변경 세부사항

○ 설계변경 내역

설계변경 내용	용역비(백만원)			관련문서
	당초	변경	증•감
안전분야 감리배치 연장	88	113	증 25	설비부-10283호(‘20.7.15.) 설비부-12457호(‘20.8.24.)
통신분야 감리배치 추가	-	5	증 5	도기본-20-11053호(‘20.9.16.)
건설사업관리기술자 배치계획 조정 (건축, 조경분야)	3,915	3,868	감 47	서남총인(감)제2020-365호(’20.4.23.)
합 계	4,003	3,986	감 17

○ 계약금액 변경내역

구분	당초	변경	증 • 감	비고
총차	4,003,890천원	3,986,070천원	감 17,820천원
4 차	1,103,890천원	1,086,070천원	감 17,820천원

○ 건설사업관리기술자 배치 변경내역

(단위: 인.월)

구분		총 차(3회)			4 차(1회)			비고
		당 초	변경	증•감	당초	변경	증•감
책임기술자(특급)		49.78	49.78	0	15.93	15.93	0
분야별기술자	토목(고급)	41.91	41.91	0	13.41	13.41	0
	토목(중급)	15.49	15.49	0	0	0	0
	******	*****	*****	****	****	****	****	*****
	******	****	****	****	****	****	****	*****
	******	*****	*****	****	****	****	****	*******
	기계(특급)	49.78	49.78	0	15.93	15.93	0
	기계(고급)	15.23	15.23	0	0	0	0
	전기(고급)	33.13	33.13	0	13.41	13.41	0
	******	*	****	****	*	****	****	*****
	******	*	*	*	****	****	*	*******
소 계		258.90	257.70	1.20	73.19	71.99	1.20
기술지원기술자		41.10	40.90	0.20	8.33	8.13	0.20
총 합 계		300.00	298.60	1.40	81.52	80.12	1.40

□ 건설사업감리단 검토 의견

○ 건설사업관리기술자 배치계획 조정(안전분야 감리배치 연장, 건축‧조경분야 감리 투입일‧투입기간 조정)을 반영한 사항으로 적정하다고 사료되며,

○ 통신분야 건설사업관리용역 과업내용 추가에 따른 계약금액 조정을 반영한 사항으로 용역수량 산출, 용역비 산출내역이 적정함

Ⅳ		조치계획

□ 서남물재생센터 총인처리시설 설치 건설사업관리용역의 설계변경 요청 건에 대해 감리단의 검토 보고가 적합하므로 설계변경을 승인하고 계약부서에 계약금액 변경을 의뢰하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술자 공문 1부.   끝.