실정보고 검토서

공사명

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 강서구 마곡동 91

· 규    모 : 총인 73.7만㎥/일

· 공사기간 : '17.9.1.~'21.4.30.

· 도 급 비 : 31,606백만원

· 시공사 : 롯데건설(주)외 1개사

· 감리단 : ㈜동해종합기술공사

외 3개사

· 설계사 : ㈜제일엔지니어링

실정보고 건명

가설사무실 손료 변경 외〔서남총인(감) 제2021-70호(2021.3.17.)〕

실정보고

사유

공사기간 연장에 따른 가설사무실 손료 및 품질관리활동비 변경, 가설사무실 및 주차장부지 아스콘·콘크리트 깨기와 상차비용이 누락되어 반영 필요함.

건설사업관리단

검토의견

가설사무실 사용기간 증가에 따른 손율적용 설계 30개월(45.5%), 변경 40.63개월(59.6%) 적정 산출됨, 품질관리자 배치기간 적정, 가설사무실 부지 기초 및 주차장부지 깨기 누락분 반영 타당함, 주요수량 및 공사비 검토결과 적정함.

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	가설사무실손율 45.5% 등 6개공종	가설사무실손율 59.6% 등 6개공종	가설사무실손료 증14.1% 등 6개공종(증감)
금액	*********	*********	**********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

필요없음

발주처

검토의견

책임건설사업관리 기술자의 의견이 적정하다고 판단되어 이를 승인

하고자 함.

비 고

***************

결재

담당

최종구

과장

오열상

부장

03/22

박홍봉