문서번호	공원시설과-1990
결재일자	2021. 4. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		양돈욱	04/02 代이정환
협 조

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 - 실정보고서(보도패턴 조정) 검토 보고

2021. 4.

한강사업본부

(공원시설과)

- 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 -

실정보고서(보도패턴 조정) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「광나루 잠원 수영장 노후상수관로 교체공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 서울시설공단 공사감독1처-2003( ̓̕21.4.1.) : 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사

○ 대    상 : 광나루, 잠원수영장

○ 공사기간 :  ̕20. 7. 6. ～ 21. 5. 30

○ 공사주요 내용

- 상수관로 교체 : 3,449m,

- 보도블록 포장 : 21,822㎡

- 화강판석 설치 : 364㎡

- 기타 관로용접 등 1식

○ 도 급 비 : ****************

***************************************

○ 계 약 자 : ********************

○ 감독기관 : ***************

□ 실정보고 내용

▶ 보도패턴 및 물량변경

○ 당초 광나루 잠원수영장 내 탈의실 및 유아용품 일대 콘크리트 상태가     양호함으로 보도설치 물량제외(기설정보고)에 따라 포장패턴 조정필요.

□ 검토 결과

○ 시설공단으로부터 제출받은 검토보고서에 대하여 검토한 결과 기 보도물량 변경에 따라 포장패턴을 조정한 사항으로 적정한 것으로 판단되며, 보도물량은 포장후 정확한 수치를 실측하여 적용하기 바람.

□ 조치 계획

○ 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 우선 시공 조치하고 추후 설계변경에 차질없도록 서울시설공단에 통보

붙임 : 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.  끝.